문서번호	기전과-13553
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김선범		전결 12/11
		代호정오
협조

2023년 어린이보호구역 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 11. (월)

강 서 도 로 사 업 소

(기전과)

2023년 어린이보호구역 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

사업소장:이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 :김선범☎7989

2023년 어린이보호구역 교통신호기 공사와 관련, 감리업체가 제출한 설계변경에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

□ 2023년 어린이보호구역 교통신호기 공사 설계변경 제출

ㅇ 문서번호 (주)동서엔지니어링 DS-서보23-1211호(2023.12.08.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년 어린이보호구역 교통신호기 공사

□ 공사위치 및 내용

ㅇ 영등포구 문래로 56 영문초등학교 앞

- 신호기 이전(3개소) 및 신호등 노란신호등으로 교체

ㅇ 영등포구 영신로 238 한영유치원 주변

- 신호기 신·이설(6개소), 잔여표시기 설치 및 노란신호등으로 교체

ㅇ 강서구 화곡로 65길 90 등원초등학교 등 5개소

- 경보등(황색등)에서 노란신호등(적색등)으로 교체강서구 등촌동 백석초등학교 등

ㅇ 강서구 등촌동 백석초등학교 등 23개소

- 노란신호등으로 교체

□ 계약금액 : 269,927,500원

□ 공사기간 : 2023년 9월 21일 ~ 2023년 12월 14일

□ 계약업체 : 신광전설 주식회사 대표자 도수옥

□ 감리업체 : (주)동서엔지니어링 대표자 이익상

Ⅲ		설계변경 사유 및 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ 실정보고 승인내용 반영한 내역 변경 및 실제 시공 수량 정산

ㅇ 간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산

ㅇ 폐기물처리비 정산 반영

□ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액(원)
교통신호등	공사 물량 감소 ▼21(474→453)	감) 4,453,715
음향신호기	공사 물량 감소 ▼8(158→150)	감) 1,653,750
지주기초 및 앙카	공사 물량 감소 ▼2(15→13)	감) 1,086,399
신호케이블	공사 물량 감소 ▼14(269→255)	감) 356,076
그 외 공종	교통정리요원 배치 등 4개 공종 물량 감소	감) 95,318
제경비 정산	간접노무비 및 보험료 등 제경비	감) 27,278,242
합계		감) 34,923,500

□ 상세 내용 및 내역 붙임 설계변경 참조

Ⅳ		설계변경 금액(총괄)

구분	당초	변경	변경금액
도급비	269,927,500원	235,004,000원	감) 34,923,500원

Ⅴ		조치의견

□ 실정보고 승인내용을 반영한 내역 변경 및 실제 시공 수량

정산, 간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산, 폐기물처리비

정산 반영한 감리업체 설계변경 내용이 적정함에 따라 이를

승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  2023년 어린이보호구역 교통신호기 공사 설계변경 제출 1부.  끝.