문서번호	기전과-13572
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박준규		12/11
		代호정오
협조

2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12. 11. (월)

강 서 도 로 사 업 소

(기전과)

2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

사업소장 : 이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 : 박준규☎7963

2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업과 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		관련근거

□ 2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 설계변경 제출

ㅇ 문서번호 (주)트래픽스 TR본23-1211호(2023. 12. 11.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 2023년 교통사고 잦은곳 개선사업 교통신호기 공사

□ 공사위치 : 강서구 발산역 교차로 등 5개소

□ 공사내용 : 교통신호기 철거 및 설치

□ 계약금액 : 148,373,280원

□ 공사기간 : 2023년 8월 3일 ~ 2023년 12월 8일

□ 계약업체 : 호곡종합건설(주) 대표자 박성환

□ 감리업체 : (주)트래픽스 대표자 김희수

Ⅲ		설계변경 사유 및 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ 실정보고 승인내용을 반영한 실제 시공 수량으로 정산

ㅇ 간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산

ㅇ 폐기물처리비 정산 반영

□ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액
교통신호제어기	설치물량 감소 2(14→12)	감)6천원
교통신호등	설치물량 감소 3(52→49)	감)2,941천원
음향신호기 및 보행자작동신호기	설치물량 증가 5(34→39)	증)479천원
교통신호지주	설치물량 감소 7(88→81)	감)196천원
신호케이블	설치물량 증가 3,889 (3,841→7,730)	증)22,174천원
굴착 및 배관	설치물량 증가 75(48→123)	증)1,153천원
그 외 공종	가로등 이설 등 4개 공종 설치물량 증가 50(69→119)	증)3,329천원
간접비	간접노무비 및 보험료 등 제경비	감)5,495천원
합 계		증)18,497천원

□ 상세 내용 및 내역 붙임 설계변경 참조

Ⅳ		설계변경 금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증 감 액
도 급 비	148,373,280원	166,870,000원	증)18,496,720원

Ⅴ		조치의견

□ 실정보고 승인내용을 반영하여 실제 시공 수량으로 정산, 간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산, 폐기물처리비 정산을 반영한 감리업체 설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  2023년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 설계변경 제출 1부.  끝.