문서번호	시설관리과-20372
결재일자	2023. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이영훈		김영민	12/13
			이규현
협조

「2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)」

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

2023. 12

북부수도사업소

[시설관리과]

「2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)」

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

『2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)』 시행 중 작업물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 심의위원회 개최 결과를 보고함.

Ⅰ	사업개요

▢ 사 업 명: 2023년 아리수올림터 모터펌프 수리(장기계속계약)

▢ 계약기간: □23. 4. 11. ~□24. 3. 31.

▢ 계 약 자: ******************

▢ 계약금액: *****************************

Ⅱ	심의회 개최

▢ 심의일정: 2023. 12. 13.(수) 14:00

▢ 심의장소: 북부수도사업소 시설관리과

▢ 심의위원

- 위 원 장: ********

- 위    원: ****************************

Ⅲ	심의내용

▢ 작업물량 증·감 및 신규공종에 따른 설계변경 사항으로 사업의 특성상 발생되는 수량 변동 및 단가 적용의 적정성 여부

▢ 단가 낙찰률 적용범위 내 적용 여부 등

Ⅳ	설계변경 사항

▢ 설계변경 내역

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증감액
총부기금액	110,851,400	110,851,400	-
1차수 금액	88,391,680	46,757,700	감)41,633,980
2차수 금액	22,459,720	64,093,700	증*41,633,980

Ⅴ	심의결과

▢ 설계변경의 타당성: 타당

▢ 신규공종 단가 산출 적정여부: 적정

▢ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성: 적정

▢ 계약 변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부: 적정

▢ 각종 제반 규정 준수여부: 준수

▢ 관련 규정의 불명확한 내용에 대한 검토: 이상없음

Ⅴ	행정사항

▢ 설계변경 정산 후 변경계약 의뢰

붙임: 1. 설계변경 심의위원회 개최 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.