아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	2023년 횡단보도 확충사업 교통신호기 공사 설계변경 시행

1. 기전과-13761호(2023. 12. 14.) 설계변경 검토보고 관련입니다.

2. 2023년 횡단보도 확충사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행

하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2023년 횡단보도 확충사업 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2023. 08. 31. ~ 2023. 12. 18.

다. 계약업체 : 동문이엔티(주) 대표자 송요일

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감 액
도 급 비	119,298,750원	95,502,000원	감) 23,796,750원

마. 변경사유 : 실정보고 승인 내용을 반영한 내역 변경 및 실제 시공 수량 정산,

간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산을 반영한 내역 변경

바. 예산과목 : 교통안전 시설물 관리, 대각선 및 일반 횡단보도 확충, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경도면 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.

5. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.

6. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	오태환		기전과장	12/14
김병용
협조자
시행	기전과-13771	(	2023. 12. 14.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)