문서번호	시설관리과-20497
결재일자	2023. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이영훈	代이영훈	12/15
		이규현
협 조

「2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역」

설계변경 심의위원회 개최

2023. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역」

설계변경 심의위원회 개최

『2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역』 시행 중 과업물량 증·감 사유가 발생하여 설계변경 심의위원회를 개최하고자 함.

Ⅰ	용역개요

▢ 용 역 명: 2023년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

▢ 용역개요: 아리수올림터·증압장·배수지 유량계 42개소

▢ 계약기간: □23. 4. 1. ~□23. 12. 31.

▢ 계 약 자: ***************

▢ 계약금액: *************************

Ⅱ	심의회 개최

▢ 심의일정: 2022.12.18.(월) 09:00

▢ 심의장소: 북부수도사업소 시설관리과

▢ 심의위원

****************

****************************************

Ⅲ	심의내용

▢ 물량 증·감 및 신규공종에 따른 설계변경 사항으로 과업의 특성상 발생되는 수량 변동 및 단가적용의 적정성 여부

▢ 단가 낙찰률 적용범위 내 적용 여부 등

Ⅳ	설계변경 사항

▢ 설계변경 내역

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증감액
총용역비		**********	**********	*********
도급비	공급가액	**********	**********	*********
	부가가치세	*********	*********	********

품 명	규 격	변경전	변경후	비 고
다회선 센서교체	다회선센서 1조	1조	0조
다회선 센서세척	다회선센서 5회선	1식	0식
환풍기	220V125*125	1개	0개
신호변환기	전류4-20mA,3 I/O ISOLATOR	1개	0개
압력전송기	0~10kg/㎠, DC24V, 4~20mm	1대	0개
수중펌프	1HP 220V	1조	0조
유량계 케이블설치	케이블포설, 비교측정, 시험가동	0식	1식
UPS교체	EA*901, 1KVA, 900W 220V	0대	7대

▢ 물량 증·감 내역

Ⅴ	조치의견

▢ 과업 물량 증·감 및 신규공종에 따른 적정성 여부를 검토 및 심의하여 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의신청서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.  끝.