문서번호	시설보수과-11766
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
김지하		안준수	12/18
			代유은중
협조
	주무관		정병구

- 충정교 보수공사(장기계속) -

설계변경(정산) 검토 보고

2023. 12.

서부도로사업소

(시설보수과)

- 충정교 보수공사(장기계속) -

설계변경(정산) 검토 보고

우리 사업소에서 시행하는「충정교 보수공사(장기계속)」 관련하여 서울시설공단(공사감독2처)의 설계변경(정산) 검토 보고서 제출에 따른 검토보고를 드림. ※ 관련근거: 서울시설공단 공사감독2처-16982(2023.12.14.)호

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 충정교 보수공사(장기계속)

❍ 공사기간 : 2021.12.06. ~ 2023.12.31.(총차)

- 1차: 2021.12.06. ~ 2022.07.30.

- 2차: 2022.07.31. ~ 2023.12.31.

❍ 공 사 비 : ***************

*********************************

❍ 공사내용 : ***********************************

******************************************

❍ 도 급 사 :****************

❍ 공사감독 : 서울시설공단 공사검독2처 감독대행

Ⅱ		추진경과

❍ 2021. 12. : 1차 공사 착공

❍ 2022.  7. : 1차 공사 준공

❍ 2022. 12. : 2차 공사 기성부분 준공

❍ 2023.  2. : 2023년도 보수공사분 추가 작업지시

❍ 2023. 11. : 2차 공사 완료

Ⅲ		보고내용

□ 설계변경 시행 근거

❍ 공사 실정보고(제6차) 승인(시설보수과-10825, 2023.11.21.)

******************

**********************************

************

□ 설계변경 내용

❍ 주요공종 수량 변경 내용 반영

구 분	규격	단위	당초	변경	증·감
****	***************	*	***	***	**	**
******		*	*	***	**	***
******		*	***	***	**	*

❍ 제경비 정산

- 보험료(건강·연금·노인장기요양), 산업안전관리비, 환경보전비, 퇴직공제부금비, 건설기계대여금지급보증서발급비, 고용개선지원비 등 정산

□ 설계변경에 따른 계약금액 조정 내역

❍ 총차                                                                       (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	*************	*************	**	***********
도 급 비	*************	*************	**	**********
관 급 비	**********	**********	**	*********
폐기물처리비	*********	*********	**	*******

❍ 2차                                                                       (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	*************	*************	**	***********
도 급 비	*************	*************	**	**********
관 급 비	**********	**********	**	*********
폐기물처리비	*********	*********	**	*******

Ⅳ		검토의견

❍ '서울시설공단'에서 제출된 설계변경 보고내용에 대해 승인하고 상기 내용과 같이 변경계약 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 설계변경 검토 보고서(서울시설공단) 1부.  끝..