문서번호	계획설계과-11052
결재일자	2023. 12. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	계획설계과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
김영규	백광인	송헌영	권민		12/19
					유연식
협 조
	주무관			김다은

건설사업관리(설계단계) 추진 계획  - 광암 고도증설 및 재정비 기본 및 실시설계 용역

- 광암정수장 고도증설 및 재정비 기본 및 실시설계 용역 -

건설사업관리(설계단계) 추진 계획

2023. 12. 18. (월)

상수도사업본부

(급수부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 광암정수장 고도증설 및 재정비 기본 및 실시설계 용역 -

건설사업관리(설계단계) 추진 계획

급수부장 : 송헌영☎3146-1401 계획설계과장 : 백광인☎1410 담당 :김영규☎1413

「광암정수장 고도증설 및 재정비」기본 및 실시설계 용역이 내실있고 안정적인 품질 확보를 위하여 건설사업관리 용역을 추진코자 함

Ⅰ		현 황

□ 사업 개요

ㅇ 사업기간 : 2022 ~ 2028년(예정)

ㅇ 사업내용 : 광암 고도확충 및 재정비

- 고도 10만㎥/일(25만㎥/일 → 35만㎥/일) 증설

- 초고도 시설 40만㎥/일 도입

- 시설 재정비 40만㎥/일(착수정, 침전지, 정수지 등)

ㅇ 총사업비 : 2,062억원

□ 그간 추진경위

ㅇ 제2부시장 방침	’20.10.28.

- 수돗물 안정적 생산체계 구축을 위한 정수센터 재건설 등 정비방안

ㅇ ‘2040 서울 수도정비계획’에 반영, 환경부 승인	’21.12. 7.

ㅇ ‘타당성조사 및 기본계획 수립 용역’ 추진 (3건)	’22. 4. ~ ’23. 6.

- 정수장 건설방향 설정, B/C 분석, 개략 시설배치, 관련기관 협의 및 의견수렴

ㅇ 서울시 상수도 종합계획 2040 수립(아리수2.0)	’23. 7. 5.

- 서측 순환정비용 정수장 신설은 보류, 정수장 사용기한 연장

ㅇ 광암 정수장 증설 추진계획(제2부시장 방침)	’23. 8.23.

ㅇ 기본 및 실시설계 용역 착공	’23.11.15.

Ⅱ		건설사업관리의 필요성

□ 건설사업관리(CM) 정의

ㅇ 공사비절감, 품질향상, 공기단축을 위해 전문지식과 경험을 가진 건설사업관리자는 발주자가 필요로 하는 건설사업 관리업무(기획, 타당성분석, 설계, 조달, 시공관리, 감리, 사후관리 등) 전부 또는 일부를 제공

□ 관련근거

ㅇ 건설기술진흥법 제38조 제3항 (발주청은 대통령령으로 정하는 설계용역에 대하여 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 하여야 함.)

ㅇ 건설기술진흥법 시행령 제57조 (건설사업관리 대상 설계 용역)

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제7조에 따른 1종 시설물의 건설공사의 기본 및 실시설계용역 또는 1종 시설물이 포함되는 건설공사의 기본 및 실시설계 용역

※시설물안전법 제7조 (1종 시설물의 종류) : 광역상수도, 공업용수도, 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도

- 신공법 또는 특수공법에 따라 시공되는 구조물이 포함되는 건설공사로서 발주청이 건설사업관리가 필요하다고 인정하는 공사의 기본 및 실시설계 용역

- 총공사비가 300억원 이상인 건설공사의 기본 및 실시설계 용역

< 건설사업관리 용역 제외 대상 >

◆ 관련근거 : 건설기술진흥법 시행령 제94조(품질관리의 확인)

◆ 대상기관 : (법 제55조 제3항)에서 대통령령으로 정하는 기관

- 제1항 제2호 및 제6호부터 제10호까지의 규정에 따른 기관 또는 지방공기업법에 따른 지방공사가 시행하는 설계로서 해당기관 또는 공사의 소속 직원이 용역 감독 업무를 수행하는 설계용역

2. 국토교통부장관의 지도ㆍ감독을 받는 공기업ㆍ준정부기관

6. 「한국가스공사법」에 따른 한국가스공사

7. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따른 한국농어촌공사

8. 「한국석유공사법」에 따른 한국석유공사

9. 「한국전력공사법」에 따른 한국전력공사 및 한국전력공사가 출자하여 설립한 발전회사

10. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단

- 지방계약법 시행령 제100조(일괄입찰의 낙찰자 선정) 제1항에 따른 일괄입찰의 실시설계적격자가 시행하는 실시설계 용역

□ 건설사업관리 업무 범위 및 내용

구분	세부사항
범위	설계 전 단계 기본설계 단계 실시설계 단계	구매조달 단계 시공 단계 시공 후 단계
내용	건설공사의 계획, 운영 및 조정 등 사업관리 일반 건설공사의 계약관리 삭제(17.12.29) 건설공사의 사업비 관리 건설공사의 공정관리 건설공사의 품질관리	7. 건설공사의 안전관리 8. 건설공사의 환경관리 9. 건설공사의 사업정보 관리 10.건설공사의 사업비, 공정, 품질, 안전 등에 관련되는 위험요소 관리 11.그 밖에 건설공사의 원활한 관리를 위하여 필요한 사항

□ **********

**********************************

********************************

***************************

************************************

*************

********************************

*********************************

*******************************************

**********************

****************************************

	< 기본 및 실시설계 용역 현황 >
ㅇ 용 역 명 : 광암정수장 고도증설 및 재정비 기본 및 실시설계 ㅇ 용역기간 : 23.11.15.~24.12.14. ㅇ 용 역 사 : ㈜건화 외 2 ㅇ 계약금액 : 3,525백만원(1차 795백만원, 2차 2,730백만원)

Ⅲ		건설사업관리 용역 발주 계획

□ 용역 개요

*****************************************

*****************

********************

************************

□ 예산 확보 방안

ㅇ 24년도 편성 예산 현황

- **************************************************************

- ******************

- 세부편성 내용

(단위 : 천원)

***		*******	****	****	**
****************		*********	*********	*
	*****************	*********	*********	*******
	*****************	******	******	*

ㅇ ***************

- **************************************

※ ***********************************

□ 입찰 및 계약 방법

ㅇ 입찰 방식 : 일반경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제252호)

ㅇ 낙찰자결정방법 : 기술용역 적격 심사

Ⅳ		향후 계획

□ 기술용역 사전 절차 시행

ㅇ 건설기술용역 타당성 심사 요청(→기술심사담당관) : ~23.12.

ㅇ 건설기술(발주) 심의 요청(→기술심사담당관) : ~24.01.

ㅇ 사업수행능력평가 심의(→기술심사담당관) : ~24.01.

□ 기술용역 발주

ㅇ 계약의뢰 : ~24.02.

ㅇ 용역착공 : ~24.03.

ㅇ 용역준공 : ~24.12.

붙임 : 내역서 1부.  끝.