문서번호	급수운영과-27567
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
최진혁	代김미승	신근호		12/26
				정한호
협 조

「2023년 구의동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사」

설계변경 추진계획 보고(1회, 최종)

2023. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2023년 구의동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사」

설계변경 추진계획 보고(제1회, 최종)

우리 사업소에서 시행하고 있는「2023년 구의동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사」의 현장여건 변화 등으로 발생된 신규 공종 및 시공물량 증·감에 대한 설계변경 추진 계획을 보고 드림

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 및 동법시행령 제74조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정안전부 예규 제252호('23.7.1.)

○「설계변경(정산) 도서 제출」공사감독2처-17653(2023. 12. 26.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 구의동 외 1개동 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2023. 4. 5. ~ 2023. 12. 31.

○ 도급금액: 975,209,500원

○ 공사개요: D=80~300mm, L=1,910m

○ 계 약 자: 시우건설㈜ 대표 이춘택

□ 공단 설계변경 자체 심의현황

***	*******	****	********	***
****	****** *********	************ *****	***************** ********** ***********************

□ 공단 검토 내용

○ 설계변경 시행 근거

- ******************************

연번	구분(제목)	주요 변경내용	관련근거
*	*******	************************** ******************* **********************	********************* *************** ********************* **************
*	*******	**************************************	********************* *************** ********************* **************
*	*******	************************** ******************* *******************	********************* *************** ********************* ***************
*	*******	********************** ************************* *******************************	********************* *************** ********************* ***************
*	*******	************************** ******************* ********************	********************** *************** ********************* ***************
*	*******	********************************* **************************** **************************	********************** **************** ********************* ***************

***************************************

연번	구분(제목)	주요 변경내용	관련근거
*	*******	************************* *******************************	********************* **************
*	*******	**************** ***************************** **************	********************* **************
*	*******	***************** ******************************* **************	********************* ****************
*	*******	***************** **************************************	********************* ***************

○ 제경비 등 실사용 정산

연번	구분(제목)	주요 변경내용	비 고
*	***********	********************************** ********************** ********************
*	**********	*************************

○ 주요공종 변경내용

공 종	규격(mm)	단위	당초	변경	증·감	비고
*******	**********	*	*****	*****	*****
******	**********	**	**	**	****

○ 설계변경으로 인한 계약금액 조정

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감	비 고
****	***********	***********	******************
*****	**********	**********	*****************
*****	***********	***********	******************

□ 사업소 검토내용

○ 신규대가 상수도 공통대가 적용 확인

○ 토공 수량산출서 수량 검토 완료

○ 부대공 실사용수량으로 조정반영

○ 제경비 요율 적정성, 단가산출 적정성 여부 점검

○ 보험료, 안전관리비사용내역, 교통정리원근무대장 등 서류 확인

○ 현장여건 변화로 신규공종 발생 및 물량 증·감 파악

○ 고용개선지원비 매뉴얼에 따른 시행 및 정산 체크

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최

***********************************

******************

***********************

*****************************************

○ 설계변경 심의위원회 개최결과에 따라 설계변경 시행하고 행정지원과로 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  1. 설계변경 검토보고서(공단) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.