신월 빗물저류시설 등 방재시설 확충공사 실시설계 적격심의 추진일정

< 2014년 10월~11월 >

일			월		화		수		목		금		토
10/12			13		14		15		16		17	심의요청 및 방침	18
			※ 5.26(월) 입찰참여업체(2개사) 심의위원 추천요청 ※ 심의절차 및 준비사항 발주부서 사전설명 및 통보								- 실시설계적격심의 요청 (도기본 → 기심) - 설계적격심의계획 수립 - 심의위원 선임 - 설계도서 배부
19			20		21		22		23		24		25
			- 옴부즈만 입회 요청 - 심의도서 도착여부 확인
26			27	검토의견 제출	28		29		30		31		11/1
			- 실시설계 지적사항 제출 (위원, 도기본 → 기심) - 기본설계 지적사항, 공통질문, 업체간 질문 검토의견 제출 (위원 → 기심)		- 실시설계 지적사항 통보 (기심→도기본→시공사) - 기본설계 지적사항, 공통질문, 업체간 질문 검토의견 통보 (기심→도기본→시공사)						- 지적사항 조치계획 제출 (시공사→도기본)
11/2			3		4		5	심의자료 제출	6	적격심의 준비	7	설계적격심의	8
			- 조치계획 적정성검토 (도기본) - 적격심의 시나리오 작성 (기심)				- 기본설계 지적사항 및 공통질문 반영사항 제출 - 실시설계 지적사항 검토의견 제출 (도기본 → 기심) - 발주기관 PPT자료 제출 - 실시설계 지적사항 검토의견서 심의위원 송부		- 설계적격심의 위원회 준비 - 회의자료 최종 검토 - 회의장 준비 확인		- 실시설계적격심의 - 설계검토 지적사항 확정 - 적격심의 결과 통보
6			7

※ 설계적격심의 기간 : 2014. 10.17(요청) ~  11.07(설계적격심의)