문서번호		차량품질관리센터-470		부장		센터장		본부장
등록일자		2024. 1. 23.
								2024.1.23.
결재일자		2024. 1. 23.
공개여부		부분공개(5)
				협조	차량계획처 처장
방침번호		본부장-5
	『’24년 CEO 신년 업무보고 관련』 신조차 품질확보 및 공정만회 추진계획 보고
2024. 1.
ㅣ차 량 본 부 차량품질관리센터

『’24년 CEO 신년 업무보고 관련』

신조차 품질확보 및 공정만회 추진계획 보고

’24년 CEO 신년 업무보고 관련, 신조전동차 품질확보 및 공정만회 방안에 대한 세부 시행계획을 수립/시행하여 전동차 안전운행에 만전을 기하고자 함

【관련 근거】

ㅇ 기획처-5058(2023.12.29.)“2024년 신년 업무보고 계획 알림”

ㅇ 차량본부 CEO 신년 업무보고(2024.1.10.)

ㅇ 기획처-280(2024.1.19.)“사장 요청사항 제11호 알림”

Ⅰ		현 황

□ 차량본부 CEO 신년 업무보고 시행

ㅇ 일 시: 2024. 1. 10.(수) 10:40 ~ 11:20

ㅇ 장 소: 스마트안전통합상황실(본사 5층)

ㅇ 내 용: ‘노후차 전량 교체 추진’ 외 10건(센터: ‘신조차 품질확보 추진 계획’ 외 1건)

□ 신조차 제작 현황

사업명	제작사	제작기간	제작현황	비 고
2‧3호선 196칸	㈜다원시스	’18.10월 ~ ’22.12월	납품완료	하자기술지원
5‧7호선 336칸	㈜우진산전	’19.05월 ~ ’23.03월	납품완료	하자기술지원
4호선 210칸	㈜다원시스	’20.06월 ~ ’24.05월	70칸 납품 완료	공정‧시운전관리
5‧8호선 298칸	㈜다원시스	’21.12월 ~ ’25.06월	설계‧제작 중	설계‧공정관리
4호선 260칸	㈜우진산전	’22.05월 ~ ’25.12월	설계‧제작 중	설계‧공정관리
5‧7호선 216칸	㈜다원시스	’23.12월 ~ ’27.08월	기본설계 중	-
GTX-A 120칸	현대로템㈜	’20.03월 ~ ’24.07월	초도 시운전 중	수탁사업
신안산선 87칸	㈜다원시스	’19.12월 ~ ’26.03월	상세설계 중	수탁사업

□ 사업별 제작진행 현황                              (’24. 1. 5. 기준)

사업명	제작사	공정률(%)			납품	비 고
		계획	실적	달성률
4호선 210칸 (21개 편성)	㈜다원시스 (김천공장)	95.36	73.59	76.37	7편성	8호편성 납품기준 약 9개월 지연
5‧8호선 298칸 (41개 편성)	㈜다원시스 (김천공장)	32.19	17.86	55.49	-	초도 제작기준 약 9개월 지연
4호선 260칸 (26개 편성)	㈜우진산전 (증평공장)	33.32	28.21	87.66	-	초도 제작기준 약 4개월 지연

Ⅱ		추진계획

□ 총괄표

구 분	추 진 내 용	추진시기	담 당	비 고
신 조 차 품질확보	① 기술검토회의 시행	2회/월	센터 PM
	② 제작감독 전수검사 입회	공정관리 시	공정관리자
	③ 품질개선 대응절차 준수	발생 시	센터 담당
	④ 공정회의 강화(소통협업회의 병행)	1회/월	센터 PM
	⑤ 출고검사 강화	발생 시	공정관리 담당
신 조 차 공정만회	⑥ 부품공급사 선정 방법 개선	신조차 발주 시	신뢰성검증 담당 (1‧8호선 190칸)
	⑦ ㈜다원시스 부품공급사 변경	’24. 1월	주행장치 담당	완료
	⑧ 제작공정 지연 만회대책 시행	’24. 1월 이후	센터 담당

□ 세부 추진계획

① 기술검토회의 시행

ㅇ 내 용: 기술자료‧설계도면 검토, 하자‧품질개선 조치 현황 및 현안사항을공유하고 신속히 해결하기 위한 회의 시행

- 주요 안건: 설계‧제작 이슈사항, 품질개선사항, 기타 신속처리 및 긴급 사항

ㅇ 대 상: 4호선 210칸 교체사업 이후(GTX-A 120칸 포함)

ㅇ 일 정: 매월 둘째주, 넷째주 시행(’24. 1월 이후)

※ 주간 공정회의 일정 조정: 첫째주, 셋째주, [다섯째주] 시행(’24. 1월 이후)

② 제작감독 전수검사 입회

ㅇ 내 용: 주요장치에 대한 전문기관 공정‧부품검사 시 공정관리자 입회

ㅇ 대 상: 차체, 주행장치, 추진장치, 보조전원장치, 냉방장치, 제동장치 등

ㅇ 방 법: 주 1회 이상 부품공급사 공정검사, 부품검사 입회 및 부품 제작 현황 점검(공정관리 업무일지 기록 유지)

※ 기 시행 중인 형식시험 입회는 품질검증 및 유지보수성 강화를 위해 2인 입회 원칙

③ 품질개선 대응절차 준수

ㅇ 내 용: 부적합사항 및 결함 발생 시 7단계 대응절차 준수(’22. 11. 21. 개정)

ㅇ 대 상: 신조차 제작 및 본선 운행 중 주요 결함, 소프트웨어 업데이트

ㅇ 방 법: 공사(센터, 사업소)와 제작사간 지속적 협의 및 대응절차를 통해 신조차 품질 확보

- 차량 제작사: 품질개선 대응절차 준수 및 차량 임의 기동금지(안전사고 예방)

- 공사 담당자: 직원 차량 기동 ➠ 작업 확인 ➠ 최종 기능점검 ➠ 시운전 확인(완료)

① 문제발생(상황보고)		② 원인조사(합동점검)		③ 검토서 제출
∙ 제작공장 품질부적합 발생 ∙ 운용 중 주요결함 발생		∙ 제작사 ․ 공정관리자 합동 ∙ 제작사 ․ 공사 점검반 구성		∙ 제작사 작성, 공사 검토 ∙ 관련 법령 적정절차 검토

(승인)

⑦ 전편성 확대적용	(승인)	⑥ 본선 성능검증		④ 모의검증, ⑤ 현차시험
∙ 법적 사항 완료 시 확대 ∙ 차량사업소 담당자 지정, 개선작업 점검표 작성․등록		∙ 대표편성 본선 시운전 ∙ 성능검증 결과 확인		∙ 제작사 자체검증 실시 ∙ 성능검증계획서에 의거 시운전선, 기지구내 검증

④ 공정회의 강화(소통협업회의)

ㅇ 내 용: 전동차 운용 관련부서와 차량제작 진행현황 공유 및 주요 이슈사항 업무협의로 신조차 설계‧제작 문제점 사전 제거 및 개선조치

ㅇ 대 상: 본사(차량 ‧ 승무 ‧ 기술본부), 차량품질관리센터, 도시철도연구원, 사업소, 차량제작사, 전문기관 등

ㅇ 일 정: 매월 넷째주 시행(’24. 1월 이후)

⑤ 신조전동차 출고검사 강화

ㅇ 내 용: 출고검사 시 유지보수 및 운용관리 기술을 보유한 초급 관리자급직원 참여로 완성차량 품질확보 및 차량분야 신규직원 기술전수

ㅇ 대 상: 4호선 210칸 교체사업 이후

ㅇ 방 법: 차량사업소 담당직원(2명) + 부장급 등(1명) / 3박4일

⑥ 부품공급사 선정 방법 개선

ㅇ 내 용: 입찰제안서 제출 시 주요 부품공급사 선정을 10여 개에서 50여 개 장치 이상 확대하는 것을 발주사양서에 명시

- 발주사양서에 명시된 장치 외의 부품공급사 선정은 차량제작사에 일임(센터는 사양준수 및 품질관리 전담)

ㅇ 대 상: 1‧8호선 190칸 교체사업 이후

ㅇ 일 정: ’24. 2월 내 1‧8호선 190칸 발주사양서 제정 시 반영

⑦ ㈜다원시스 부품공급사 변경

ㅇ 내 용: *****의 대차프레임 부품공급사 납품지연에 따른 제작공정 중단을 해소하기 위한 부품공급사 변경 추진(***************)

ㅇ 대 상: 4호선 210칸, 5‧8호선 298칸 교체사업

ㅇ 일 정

- ’24. 1. 12. ************ 납품실적‧품질인증 확인 및 제작사 통보

- ’24. 2월 형식시험(대차하중시험) 진행 및 양산품 병행 제작 ⇨ 공정만회

※ 4호선 210칸 ’24년 내 납품 추진 및 5‧8호선 298칸 김천‧정읍공장 병행 생산 추진

⑧ 제작공정 지연 만회대책 시행

구 분	내 용	비 고
설계승인 업무 집중관리	∙ 7일 내 검토결과 통보 및 지속적인 승인현황 관리
********	∙ **********************
관계부서 소통협업 강화	∙ 본선 시운전시험 일정 단축을 위한 심야 시운전 시 긴급작업 외 우선 협조(승무 ․ 기술본부, 관제센터) ∙ 전동차 ․ 시설물 접촉 사전검증, 이례사항 공유	④ 공정회의강화 참조
기술협의 및 신속검토	∙ 제작사 합동 주간공정회의 및 수시 기술협의 ∙ 개조승인 시 기술자료 등 합동 ․ 신속 검토	① 기술검토회의 참조

Ⅲ		결 론

□ 상기 공사 신년 업무보고의 내용과 같이 신조전동차 품질확보 방안과 제작공정 정상화 대책을 추진하여 신조전동차 품질관리 업무에 만전을 기하고 공정이 조속히 정상화 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

2024. 1. 23.

차량본부 차량품질관리센터