문서번호	동북권사업과-1089
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	지역협력팀장	동북권사업과장
김건동	김경숙	02/05
		이기호

『구의역 일대 도시재생활성화계획』

걷고 싶은 미가로 조성 사업사업 관련 협의 검토

2024. 2.

균 형 발 전 본 부

(동북권사업과)

『구의역 일대 도시재생활성화계획』

걷고 싶은 미가로 조성사업 관련 협의 검토

동북권사업과장 : 이기호 ☎2133-8275 지역협력팀장 : 김경숙 ☎8294 담당 : 김건동 ☎8296

구의역 일대 도시재생활성화계획 중 걷고 싶은 미가로 조성사업과 관련하여 광진구로부터 추진계획 협의안이 제출되어 검토하고자 함

1		추진개요

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명: 걷고 싶은 미가로 조성사업

ㅇ 위    치: 광진구 구의동 미가로 및 구의역 진입골목

ㅇ 사업기간: `21. 11. ~ `24. 12.

ㅇ 사 업 비: 2,427백만원(시비보조금, 23년 2,317백만원)

ㅇ 내    용

- 안전한 보행환경 및 가로변 선형 테마거리 조성

· 보행자우선도로 공사(8,300㎡, B=4~12m, L=960m)

: 보차도 구분, 포장재 교체, 보도블럭 신설

- 미가로(삼거리)에 다목적 광장 조성 및 특화시설 조성

· 미가로 상징 광장 조성(400㎡)

· 특화시설 조성(플랜터 및 쉼터)

□ 추진경위

ㅇ 구의역 일대 도시재생활성화계획 수립	’21. 9.15.

ㅇ 도시재생활성화계획 고시	’22. 6. 2.

ㅇ 걷고 싶은 미가로 조성사업 기본 및 실시설계(市)   ’21.11.23.~’23. 6.16.

ㅇ 공사시행 의뢰(市 → 광진구)	’23. 8. 7.

ㅇ 보조금 교부 요청(광진구 → 市)	’23. 9.22.

ㅇ 시비 1차 보조금(2,317백만원) 교부(市 → 광진구)	’23.10.19.

ㅇ 걷고 싶은 미가로 조성사업 조속시행 요청(市 → 광진구)	’23.10.31.

ㅇ 걷고 싶은 미가로 조성사업 추진계획 관련 협의(광진구 → 市)       ’23.11.20.

ㅇ 걷고 싶은 미가로 조성사업 추진계획 관련 협의 회신(市 → 광진구) ’23.11.27.

- 예산 이월 및 광진구 실정에 맞는 설계용역 협의(활성화계획 세부내용 범위 안에서 추진)

ㅇ 설계용역 市기술용역 타당성 심사완료(광진구)                         ’23.12.12.

ㅇ 걷고 싶은 미가로 조성사업 추진계획 관련 추가 협의(광진구 → 市)        ’24. 2. 2.

2		광진구 협의 요청 사항

*******************

*********************************************************************************************

*********

**********************************************************************************************************************************************

□ 설계용역 추진시 향후 일정

서울시 협의(승인)		설계용역 발주		설계용역 시행(심사 등)		공사 시행 (일정 변동가능)
'24. 2.		'24. 2.		'24. 3.~7.		'24. 8.~12.
광진구 주택관리과		주택관리과		주택관리과		광진구 도로과

3		검토 의견

: ***********

*******************************************************

붙임  1. 광진구 협의 공문 1부.

2. 사업 추진 계획서 1부.  끝.