문서번호	물재생계획과-5289
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
신현우	代김남경	03/29
		신현석

하수관로 정비 사업계획 변경 검토보고(성북구)

2024. 3.

물재생계획과

(하수관리팀)

하수관로 정비 사업계획 변경 검토보고(성북구)

물재생계획과장 : 신현석☎2133-3780 하수관리팀장 : 정한영☎3794 담당 : 신현우☎3790

「보문로 184-10 일대 하수관로 개량」사업 관련하여 사업계획 변경(사업대상지 조정) 요청에 대한 검토 결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 보문로 184-10 일대 하수관로 개량

ㅇ 사업기간 : 2024. 3. ~ 9.

ㅇ 사업규모 : 노후 하수관로 개량 D450~600mm, L=577m

ㅇ 총사업비 : 702백만원

ㅇ 세부사업대상

********************************************************************************************************************************************************************************

Ⅱ		요청사항

□ 사업계획 변경 사유

ㅇ 보문로35길 6 일대 구간은 '23년 도로포장이 시행되어 도로법시행령 제56조 6항에 따라 도로굴착이 3년간 통제됨.

ㅇ 도로굴착이 수반되는 하수관로 개량사업 추진이 불가함에 따라 대체 사업대상지를 마련하고 제외되는 구간은 추후 비굴착 보수 시행.

□ 사업계획 변경 내용

ㅇ 사업변경대상

**********************************************************************************************************

ㅇ 위치도 및 현황사진

*********************

Ⅲ		검토의견

***********************************************************************************************

******************************************************************************************************************

******************************************************************************************

Ⅳ		향후계획

ㅇ 사업계획 변경요청에 대한 검토의견 회신(물재생계획과→성북구)

ㅇ 금회 제외되는 사업구간 추후 비굴착 보수 시행

붙임 : 1. 사업계획 변경요청 공문 1부.

2. 사업계획변경 방침 1부.

3. 사업관리용역 검토의견서 1부.  끝.