문서번호	건축부-5075
결재일자	2024. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
양희식		박용구	04/01
			소영수
협 조

『시립발달장애인복지관 별관 건립공사』

설계의도구현용역 준공기한 연기 검토보고

2024. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『시립발달장애인복지관 별관 건립공사』

설계의도구현용역 준공기한 연기 검토보고

건축부장 : 소영수☎6438-2208 복지시설과장 :박용구☎2250 담당 :양희식☎2251

『시립발달장애인복지관 별관 건립공사』의 설계의도구현용역과 관련하여 공사기간 변경에 따른 용역 준공기한 연기를 검토 후 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 시립발달장애인복지관 별관 건립공사 설계의도구현용역

ㅇ 계 약 자: ***********

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 계약기간: '23. 2.16.~'24. 4.15.

ㅇ 용역내용

- 현장여건을 반영한 자재·장비 선정 또는 변경에 대한 검토·확인

- 시공단계 디자인 관련 사항의 검토·확인 등

ㅇ 추진경위

- '23. 2.16. : 공사착공

- '23. 2.16. : 설계의도구현 용역 착수

- '24. 1.~2. : 동절기 공사 중지

- '24. 3.28. : 설계의도구현용역 계약변경 요청 검토

□ 준공기한 연기(변경계약) 내용

ㅇ 추진근거

- (건설사업관리단) 설계의도구현용역 계약기간 변경 요청 건,‘24. 3.28.

ㅇ 용역 변경내용

구 분	변경전	변경후	비고
계약기간	*******************	*******************	******
계약금액	***********	***********	****

************

********************************************************************

ㅇ 준공기한 연기 귀책사유: **************

**************

□ 검토의견

ㅇ 책임건설사업관리자 검토의견

- ********************************

ㅇ 공사관리관 검토의견

- ***********************************

붙임: (건설사업관리단) 설계의도구현용역 계약기간 변경 요청 건 1부.  끝.