문서번호	시설보수과-3450
결재일자	2024. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
박지훈		代고흥일	04/05
			조현석
협조

수출의다리고가 보수공사

발주 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 04.

남부도로사업소

(시설보수과)

수출의다리고가 보수공사 발주 계획 보고

2022년 정밀안전점검결과 발견된 시설물 손상에 대한 보수실시로

시설물의 내구성 증진 및 안전성을 확보하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 시설물 이용 환경을 제공하기 위한 보수공사 발주 계획임.

□ 시설물 현황

시 설 명	위 치	규 모	준공 년도	구 조	노선명
수출의다리고가	************* **********	*************	****	**	****

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 수출의다리고가 보수공사

○ 공사개요 : *********************************************

○ 공사기간 : ********************

○ 예 산 액 : *********

○ 예산과목

-  ***************************************************

□ 사업비 집행계획

(단위:천원)

구분	총사업비	도 급 비	관 급 비	이전비 및 기타	계약심사 절감액
수출의다리고가	*******	*******	*******	******	*****

□ 추진현황

○ '22. 4. ~ ’22. 12. : 정밀안전점검용역 시행

○ '24. 1. : 현장조사 및 기본설계

○ '24. 2. : 특정기술 선정심사위원회 개최

○ '24. 2. ~ 3. : 실시설계시행

○ '24. 4. 3. : 공사계약심사 이행(계약심사과)

□ 시행방법

○ 입찰방법 : 제한경쟁(지역제한)

○ 입찰참가자격

- ************************************************************************************************************************************************************************************

- ***********************************

**************************

- 본 사업은*********.

○ 시공자격 업종별 추정금액

- *********************************

- ************************************

▶ **************************************

○ 특허제품(공법) 입찰공고문 명기

- *********************************************

○ 하자담보 책임기간

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조, 건설산업기본법 시행령 제30조 관련 별표4에 의함.

□ 향후 계획

○ '24. 4. 5.: 예산재배정 요청(교량안전과)

○ '24. 4. 5.: 공사발주

○ '24. 5. ~ ’24. 12. : 공사착수 및 준공

붙임 : 1. 공사설명서 1부.

2. 설계도면 1부.

3. 설계내역서 1부.  끝.