투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	유한회사 한백종합건설 대표 이진일 귀하
(경유)
제목	신상도지하차도(4차) 공사중단 지시

1. 신상도 2014-04호(2014.10.24.)와 관련입니다.

2. 위 호로 귀사에서 공사중지 요청하신 건에 대한 검토결과 현재 세입자 미 이주 및 민원발생 등으로 2015년 2월초에나 건물 철거가 예상됨으로 공사를 중단(인력 철수) 하시되, 공사재개가 필요하여 우리본부의 요구가 있을 때는 즉시 인력과 장비가 투입되어 공사가 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	10/30 노우성
협조자	주무관	박근우
시행	토목부-21141	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개