국회의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-17444
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	도시안전과장

주무관		치수계획팀장	하천관리과장	물관리정책관	도시안전실장	결재
엄기숙		代김동철	김용학	代배광환	11/03 조성일
협 조
	하천관리팀장				김준형

제 목	2014년 국토교통위원회 국정감사 서면답변서 제출

1. 기획담당관-16039(2014.10.29.)호와 관련입니다.

2. 2014년 국토교통위원회 국정감사 서면답변서를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 서면답변서 1부.  끝.

김성태 의원 (국토교통위원회, 새누리당)

1. 강남역 일대 침수대책

가. 강남역일대 배수개선 수립 설계용역(약 14억원)을 하면서 부실한 업체가

선정되어 사업추진이 지연되고 있는데 더 이상 지체되지 않기 위한 개선 대책은?

□ 강남역일대의 침수방지대책을 수립하기 위해 2013년 3월 ‘강남역일대 배수개선대책 수립’ 설계용역을 착수하여  ’15년 2월 완료목표로 시행중임

○ 설계용역은 계약관련법령 등에 의거 일반공개경쟁입찰(적격심사)로 용역업체<공동수급: ㈜동호외 2개사>를 선정하고 과업을 수행해 왔음.

○ 그러나, 금년 7월  공동수급자 구성원인 1개사<㈜동호>가  경영악화로 파산되어 현재 나머지 2개사가 용역을 수행중에 있음

- 참여 용역사 및 기술자의 사업수행능력을 면밀하게 평가하여 선정함

(컨소시엄 구성 : 동호:38%, 범한ENG:32%,현대ENG:30 %)

○ 당초 계획은 금년 6월 완료계획 이었으나 강남역 일대 침수는 반포천 통수능 부족 등 복합적인 요인에 의해 발생한 만큼 근본적인 대책을 강구하기 위해서는 여러 가지 대안 비교검토 등에 상당한 시간이 필요하여 용역기간을 연장하였음.

□ 강남역 일대 침수방지사업의 중요성과 시급성을 인식하여 빠른 시일내   최적안을 마련하고, 2015년에 공사를 착수할 수 있도록 사업추진에 더욱 만전을 기하겠음

작성자	기 관 명 (부 서 명)	직 위	성 명
	서 울 특 별 시 (하천관리과)	담당사무관	김준형
	☎ 2133-3389	실무사무관	손창익
	작 성 일 : 2014. 10. .