문서번호	도로계획과-14311
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	도로정책팀장	도로계획과장	시설안전정책관
정용훈	이승석	형태경	전결 11/04 한제현

준공기한 연기 보고

(한강상 교량 연결램프 구조개선(강북지역) 기본설계 용역)

2014.  11.

도시안전실

(도로계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

준공기한 연기 보고서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 한강상 교량 연결램프 구조개선(강북지역) 기본설계

나. 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 외 1

다. 계약금액 : 금398,300,000원(금삼억구천팔백삼십만원)

라. 계약년월일 : 2013. 5. 16.

마. 착수년월일 : 2013. 5. 16.

바. 준공예정일 : 2014. 11. 15.

2. 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한

- 당  초 : 2014년 11월 15일

- 변  경 : 2014년 12월 26일

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 기본설계(안)에 대한 관련부서 협의 및 건설기술심의(설계심의) 등 행정절차 기간의 추가 소요로 절대공기 부족에 따른 과업기간 연장 필요

2014.  11.

보고자 : 지방시설주사보 정용훈