문서번호	하천관리과-17626
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관
최년수	구자훈	김용학	11/06 代배광환

“방재시설 능력 향상 기본 및 실시설계 용역”

준공기한 연기 검토 보고

2014. 11.

도 시 안 전 실

(하 천 관 리 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

“방재시설 능력 향상 기본 및 실시설계 용역” 준공기한 연기 검토 보고

Ⅰ		용역개요

용역현황

용역명	계약업체		계약기간	계약금액 (원)	비고
	상호	대표자
방재시설능력향상기본및실시설계용역(금호,자양4,염창1)	㈜제일엔지니어링종합건축사무소	최태희	2013.11.13~ 2014.11.12	512,080,000	공동 수급
방재시설능력향상기본및실시설계용역(상수,당인,박미)	동부엔지니어링(주)	이문호		459,833,000	공동 수급

과업내용 : 빗물펌프장 시설용량 증대

- 방재시설 능력을 30년 강우강도로 상향

- 다양한 방재시설물 설치(빗물저류조, 유역분리 및 변경등) 검토 및 설계

Ⅱ		추진경위

2013. 11. 13. : 설계 용역 계약 및 착수

2013. 12. 30. : 착수보고회

2014. 03. 05. : 추진현황 보고

2014. 04. 30. : 1차 자문회의

2014. 05. 29. : 2차 자문회의

2014. 08. 06. : 기본설계 보고

2014. 08. 07. ~ 현재 : 실시설계 진행중(관할구청)

Ⅲ		연기사유 및 내용

연기사유

빗물펌프장내 주민친화시설 설치에 대한 주민여론조사 및 설계내역 확인을 위한        현장조사, 과업(행당빗물펌프장 기본 및 실시설계) 추가에 따른 기간 소요

용역별 내용

방재시설능력향상기본및실시설계용역(금호,자양4,염창1)

● 염창1, 행당빗물펌프장

- 주민친화시설 활용용도 결정

● 과업변경 : 행당빗물펌프장 기본및실시설계 추가

방재시설능력향상기본및실시설계용역(상수,당인,박미)

● 상수빗물펌프장

- 주민친화시설 활용용도 결정

- 설계내용 확인 현장조사 추가 시행(관거내부조사,강제토출관로구간 지장물조사)

● 당인빗물펌프장

- 설계내용 확인 현장조사 추가 시행(관거내부조사,강제토출관로구간 지장물조사)

Ⅳ		준공기한 연기내용

당 초 : 2013. 11. 13 ~ 2014. 11. 12

변 경 : 2013. 11. 13 ~ 2015. 02. 12. (90일 연기)

연기사유 귀책소재 : 서울특별시

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅴ		조치의견

상기와 같이 용역계약기간을 연기하여 과업 수행에 만전을 기하고자 함.

첨 부 : 방재시설능력향상 기본 및 실시설계용역 과업연장 승인요청 공문 2부. 끝.