함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	(주)통일건설기술원 대표 김태규 귀하(134-859 서울특별시 강동구 상암로 41 304호,305호(암사동,암사동양덱스빌))
(경유)
제목	정밀안전진단 용역 성과품 납품지체에 따른 납품독촉 및 계약해지 사유발생 안내

1. 귀사의 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 우리사업소간 계약체결하여 시행중에 있는 “강서수도사업소(민   원센터) 건축물 정밀안전진단 용역(계약번호 : 20140*******00)”과 관련하여 용역완수기한인 2014.9.11.을 경과하여 지연배상금 예상금액이 계약금액의 100분의 10을 초과하는 현재까지도 성과품이 완납되지 않아 용역준공이 지연되고 있어 성과품 납품을 독촉하니 조속히 납품토록 하여 주시기 바랍니다.

가. 미납 성과품 내역 : e-보고서(전산파일형태) 10부

※ 기타 성과품은 기납품

3. 아울러 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제30조의2(계약의 해제․해지 등) 제1항 제2호 규정에 의거 「지연배상금의 금액이 계약금액의 100분의 10 이상인 경우로서 계약상대자의 귀책사유로 인하여 계약을 이행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우」에는 계약의 해제 ․ 해지 등의 조치를 취하도록 규정되어 있어 계속 납품지연이 지속될 경우에는 계약의 해제 ․ 해지를 추진할 계획임을 알려드리니 불이익이 발생하지 않도록 적극적으로 계약 이행이 완료될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	전기우		행정관리팀장	김경식		행정지원과장	전결 11/14 이만섭
협조자
시행	행정지원과-22241	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 신정동 319-15	/
전화	02-3146-3820	/전송	02-3146-3879	/	j8228j@seoul.go.kr	/	대시민공개