문서번호	물재생계획과-11028
결재일자	2013.8.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	하수관리팀장	물재생계획과장		물관리정책관
이원영	이도우	한유석		08/23 정만근
협 조	하수계획팀장		양병현
	하수정보팀장		이승원

『20년 이상 노후사각형거의 안전 사각지대 해소를 위한』 안전점검용역 및 용역결과 DB구축 시행계획

2013. 8

도시안전실

물재생계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	25개 자치구	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『20년 이상 노후사각형거의 안전 사각지대 해소를 위한』

안전점검용역 및 용역결과 DB구축 시행계획

20년 이상된 노후 사각형거 안전점검용역 및 용역결과 DB구축 추진계획을 통해 체계적인 유지관리 기능강화 및 안전사고를 사전에 예방코자함

【 관련문서 : 물재생계획과-103745(2011.5.26) 】

▢ 추진배경

❍ 도시기반시설인 하수관로 구조적 안전상태 주기적 수시확인 필요

- 20년 이상 노후 사각형거 안전점검 용역 실시로 도시안전 구현

❍ 안전점검용역 시행후 용역결과 등 자료관리 상태 미흡

- 사각형거 안전점검 용역결과 DB입력 미비

- 종전에는 공사대장(공사개요, 위치 등) 위주로 등록되어 있어 DB입력시 안전점검 용역 내용(점검여부,등급판정 등) 부재

※ 2012년부터 안전점검용역 결과 DB 구축

▢ 사각형거 현황

❍ 조사대상

-  서울시 사각형거 전체 연장 1,386㎞, 차집관거(사각형거) 251㎞, 개거 51㎞ 제외한 우수 및 합류식 사각형거 1,084㎞를 대상으로 함.(‘12.12.31기준)

❍ 하수암거 구분

기능별 연장	계	우수	합류식
	1,084㎞	37㎞	1047㎞

부 설 연도별	계	10년미만 (‘03.1.1~’12.12.31)	10~20년 (‘93.1.1~’02.12.31)	20~30년 (‘83.1.1~’92.12.31)	30년이상 (‘82.12.31 이전)
	1,084㎞	263㎞	123㎞	174㎞	524㎞

▢ ‘12년 추진실적

❍ 사각형거 안전점검 용역

- 20년 이상 노후 사각형거

총 연장	기완료	‘12년 실적	‘13년 대상	‘14년 이후 대상물량
698㎞	269㎞	65㎞	58㎞	306㎞

※ 자치구별 20년 미만 사각형거 안전점검 용역 실시 : ‘12년까지 174km

❍ 용역결과 DB 입력

- 20년 이상 노후 사각형거

총 연장	‘12년 실적	‘13년 대상	‘14년 이후 대상물량
698㎞	269㎞	96㎞	333㎞

※ 자치구별 20년 미만 사각형거

- ‘12년까지 159km 완료, ’13년 23km, ‘14년 이후 204km 입력예정

❍ 용역결과 DB 구축

- 사각형거 안전점검 자료 대장 작성

□ 관거번호별 점검 및 보수이력 현황 기록 및 사각형거 현황도와 연계관리

□ 안전점검 자료관리

안점점검 대장	안전점검 이상항목 관리

외관조사관망도 관리	안전점검 사진관리

- 사각형거 현황도 구축

□ 시행년도 및 점검유형별(안전점검,정밀점검,정밀안전진단) 현황도 작성

▢ ‘13년 추진계획

❍ 추진방향

- 20년 이상 노후 사각형거 안전점검 1회 이상 시행

□ 안전점검 미시행 사각형거에 대해 2012~2014년까지 점검완료(‘13년 58km)

- 기완료 안전점검 용역결과 현황 DB구축(입력)

□ 기 시행 완료된 정밀점검, 정밀안전진단 구간(119㎞) DB입력

❍ ‘13년 사업개요

- 사업대상

□ 사각형거 안전점검용역 : 12개구 58km

□ 용역결과 DB 입력 :  13개구 119km

- 소요예산 : 700백만원(안전점검 590백만원 / DB입력 110백만원)

- 사업기간 : ‘13. 8월 ~ ’14. 1월

❍ 세부추진사항

- 세부일정

용역 시행	➡	안전점검 및 정밀안전진단	➡	점검결과 DB구축	➡	안전점검 등 현황자료 DB입력
(‘13.8월)		(‘13.9~10월)		(‘13.11월)		(‘13.12월)

※ 점검종류 및 DB 입력사항

구 분		점검주기 및 내용	비 고
안전점검	정기점검	반기별 1회 이상(육안 및 휴대장비 등에 의한 점검)
	정밀점검	2년에 1회 이상(육안, 점검기계 및 기구 등에 의한 점검)
	긴급점검	정기점검 등 이상발견시, 천재지변 등 관리자가 필요하다고 인정하는 때
정밀안전진단		안전점검 결과 정밀한 측정기구를 사용한 물리적 기능적 결함 조사분석 및 보수보강이 필요하다고 판단될 때 실시

□ 정기점검 : 정기점검 현황표(육안점검), 외관조사결과 사진

□ 정밀점검 : 정밀점검 현황표(상태평가 등급), 외관조사결과 사진

□ 정밀안전진단 : 정밀안전진단 현황표(종합평가 등급), 이상항목 현황표, 외관조사결과 사진, 외관조사망도

- 20년 이상 노후사각형거 안전점검 의무화 시행

□ 사각형거 준공일로부터 20년 도래시 최초 정밀점검을 실시하고 이후 5년에 1회 안전점검 시행

□ 정밀점검, 정밀안전진단은 노후사각형거 정기점검후 이상발견 정도에 따라 시행

□ 배수분구 종합정비 사업시 사각형거에 대한 육안점검 및 정밀점검(정밀안전진단)시행

· 배수분구 현황조사시 해당지역 사각형거에 대한 육안점검 우선 시행

· 점검 결과에 따라 정밀점검,정밀안전진단 시행

· 정밀점검, 정밀안전진단 결과 보수보강 및 예산반영 계획 수립 용역 시행

배수분구 종합정비 용역시행	➡	사각형거 현황조사	➡	육안점검 시행	➡	정밀진단 대상파악	➡	정밀진단 시행	➡	보수보강 및 예산 계획수립
(착공)		(공정20%시점)		(공정40%시점)		(공정60%시점)		(공정80%시점)		(공정100%시점)

▢ 행정사항

❍ 하수암거 안전점검 및 GIS DB구축 예산 재배정                  (단위:백만원)

구 분	예산액	기배정액	금회배정 예정액	예산배정 잔액	비 고
하수박스 안전진단 등 용역	700	0	700	0

※ 예산과목 : 하수시설관리,하수도관리,하수박스 안전진단 등 용역, 시설비(206-401-01)

▢ 향후계획

❍ 20년 이상 노후사각형거 안전점검 연차별 지속시행

❍ 사각형거 안전점검용역 결과 입력 등 현황관리 지속

❍ 자치구별 ‘14년 사각형거 안전점검(정기점검) 계획을 수립토록 하여 모든 사각형거에 대해 5년에 1회는 점검이 시행 될 수 있도록 제도 정착

첨부 : 1. 사각형거 연도별 부설현황 1부.

2. 노후사각형거 안전점검용역결과 DB입력 현황 1부.

3. 노후사각형거 안전점검 현황 1부.

4. ‘12년 사각형거 점검현황표 1부.

5. 사각형거 현황도 1부.

6. ‘12년 안전점검용역 실적 1부.

7. ‘13년 안전점검용역 및 용역결과 DB입력 예산배정 현황 1부. 끝.