문서번호	정수시설과-3358
보존기간	년
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	代최양교	11/24 김동기
협 조
	주무관		변병수

설계변경 보고

「뚝도아리수정수센터 외벽청소 용역」

2014. 11

뚝도아리수정수센터

설계변경 시행 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『2014년 뚝도아리수정수센터 외벽청소 용역』에 대한 설계변경 시행 보고임

Ⅰ		용역 현황

○ 용 역 명 : 『2014년 뚝도아리수정수센터 외벽청소 용역』

○ 용역개요 :

구분	외부유리세척(㎡)	외부판넬세척(㎡)	용역비(원)	비고
당초	5,164	25,962	26,332,112
변경	5,164	25,962	26,198,410	감133,702원

○ 용역기간 : 2014. 04. 09 ∼ 2014. 11. 30

○ 용 역 사 : (주)푸른환경코리아  대표 정희석, 공은미

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

Ⅱ		감독 현황

○ 공사감독기관

- 소  속 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

- 감독자 : 장현순(담당)

Ⅲ		설계변경 사유

○ 설계 변경 사유

- 고용보험료(당초 노무비×1.8% ⇒ 변경 노무비×0.9%)요율 변경 적용

※ 하반기 본부 재무회계과 지적사항 반영

Ⅳ		조치의견

○ 상기와 같은 설계변경 사항에 대하여 붙임 설계도서에 의거 설계변경 시행 및 변경계약 코자 함

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 변경합의서 1부.  끝.