업무연락전
작 성 자	김은덕	작성일자	2014-11-27	문서번호	도시기반시설본부-14-45833
대상현장	[장충체육관 리모델링 공사]주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소
제 목	전기실 등 건축마감공사 조속 이행 업무지시
내 용
1. 장충체육관 리모델링사업은 12월 말 준공을 목표로 각 공종별로 마무리공사를 시행함으로서 공종별 간섭으로 지연 및 부실시공이 우려돼 업무지시하니 책임감리원은 아래사항 확인 및 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 가. 현재 건축 공사 마감이 완료돼지 않아 전기공사를 완료할 수 없는 관계로 전기설비 사용전 검사는 단계적으로 실시할 예정이며, 1차 사용점 검사는 12.2일 받을 계획이니 전기실 건축마감공사(바닥, 벽, 트렌치 등)는 11.28일까지 완료 시킬 것.(전기실 마감공사 지연시 전력 수전일정 지연) 나. 2층복도 간접조명 및 옥외 경관조명이 당초 계획대로 시공되기 위해서는 조명기구 설치 부위 건축마감공사가 당초 설계도면과 같이 시공돼야함이 필연적이기에 설계서와 차질 없도록 조치할 것. 단, 조명과 관련된 건축분야 설계변경을 할 계획이라면 전기시공사와 협의하여 대책 등을 마련 12. 2.(화) 까지 검토 보고할 것. 끝.
붙임 :

서울특별시