투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(남산공원 남측순환로 정비공사)

1. 시설과-8412(14.11.27)호와 관련입니다.

2.『남산공원 남측순환로 정비공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경을(1회,최종) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 남산공원 남측순환로 정비공사

나. 공사기간 : 2014.06.25 ~ 2014.12.01

다. 도 급 자 : 정로건설(주)  대표 : 이강태

라. 설계변경내용 : 따로붙임

마. 설계변경금액 :                                           (단위:원)

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증,감
공 사 비		384,486,000	561,110,000	중)176,624,000
도급비	공급가액	349,532,728	510,100,000	증)160,567,272
	부가가치세	34,953,272	51,010,000	증) 16,056,728
	계	384,486,000	561,110,000	증)176,624,000

바. 예산과목 : 남산및산하공원운영, 남산및산하공원보수정비사업, 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비(401-01). 끝

붙 임 1. 설계변경 방침서. 1부.

2. 설계변경 내역서 및 제비율검증표 1부. 끝.

주무관	김영수		시설팀장	김영백		시설과장	함석주		중부공원녹지사업소장	11/28 이용태
협조자	주무관	길민하
시행	시설과-8422	(		)	접수		(		)
우	140-899	서울 용산구 남산공원길 3 (후암동 30-66)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개