투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『서울대공원 남미관 보수공사』설계변경(준공정산)시행

1. 시설과 – 6985호(2014.11.14.) 및 –7455호(2014.12.03.)와 관련입니다

2. 우리 대공원에서 시행중인“서울대공원 남미관 보수공사”와 관련하여 공사변경 및 정산사항에 대하여 설계변경(준공정산)시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 남미관 보수공사

나. 공사금액 : 금258,354,730원

다. 공사기간 : 2014. 9. 16. ~ 2014. 12. 20

라. 계 약 자 : ㈜믿음종합건설 대표 김 영 균

마. 준공정산 설계변경 내역

(단위 : 원)

계약금액	변 경 후	비 고
258,354,730	306,200,000	증 47,845,270

바. 설계변경 사유 : 공사물량 증감 및 제 경비 정산 등

붙임 : 1. 실정보고서(제 1차) 및 준공정산 설계변경 보고서 각 1부.

2. 설계변경(준공정산)내역서 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	이강호		시설과장	12/03 공헌구
협조자	주무관	이상국		주무관	김현정		주무관	김희준
시행	시설과-7487	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7412	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개