투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제1차 설계변경자문회의(본부위원회) 개최 알림

1. 2014년 제1차 설계변경자문회의(본부위원회) 개최와 관련입니다.

2. 설계변경자문회의를 아래와 같이 위원 선정하여 개최하오니 발주부서 담당자는 자문자료에 단가결정, 협의근거, 설계자검토의견, 실정보고서, 발주처 방침서 등 근거자료를 포함 작성(쪽번호 명시)하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며,

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법 변경의 적정성, 설계변경 절차 이행의 타당성등을 면밀히(사전) 검토하여 내실있는 자문이 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	제1차 설계변경자문회의(본부위원회)
일 시	2014. 12. 12(금) 13:30
장 소	도시기반시설본부 대회의실(서소문별관 2동 3층)
자문위원	위 원 장 : 토목부 부장 노 우 성 간 사 : 토목부 도시고속도로과장 명 경 출 내부위원 : 토목부 토목설계과장 조 성 만 기후환경본부 생활환경과 음식물시설팀장 유병기 외부위원(계약) 신은영(한국건설기술연구원, *************) 외부위원(구조) 유제남(도화엔지니어링, *************) 외부위원(시공) 김양중(경동엔지니어링, *************) 외부위원(전기) 강성구(한터기술, *************)
자문안건 (3건)	1. 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 ---------- 방재시설부 ο 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 변경 ⇒ 증 16,339,000천원 2. 구리암사대교 건설공사 --------------------------- 토 목 부 ο 차량방호 안전시설물(가드레일) 변경 ⇒ 증 1,782,000천원 ο 광역상수도 보강공사비 반영 ⇒ 증 1,124,000천원

붙 임 : 설계변경 본부위원회 자문요청서(3건)  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	방재시설부장,한국건설기술연구원 수석연구원 신은영님 귀하,(주)도화엔지니어링 부사장 유제남님 귀하,(주)경동엔지니어링 부사장 김양중님귀하,(주)한터기술 부사장 강성구님 귀하
주무관			도시고속도로과장			토목부장
협조자	토목설계과장			음식물시설팀장
시행	토목부-24117	(	2014.12.5.	)	접수	방재시설부-12820	(	2014.12.5.	)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개