문서번호	기전과-8538
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	성동도로사업소장
채희준		代채희준	12/08 정진오
협조

『교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)』

설계변경 검토 보고(2차)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1구역) 외 1건 공사에 대하여 설계변경을 추진코자 합니다.

관련근거

○ 성동도로사업소 기전과-7161(2014.10.15)호 : 교통신호기 예산 집행 계획

○ 영호 본 2014-12-03(2014.12.04)호 : 1구역 설계변경서(1차) 제출

○ 영호 본 2014-12-04(2014.12.04)호 : 2구역 설계변경서(1차) 제출

공사개요

구 분	교통신호기 신설 및 보수공사(연-1구역)	교통신호기 신설 및 보수공사(연-2구역)	비 고
공사기간	'14.03.21~'15.02.28	'14.03.21~'15.02.28
도 급 자	동서전기건설공사 박진규	오성건설공사 노행조
도 급 비	357,368,000원	408,342,000원
감 리 사	(주)영호이앤씨	(주)영호이앤씨

예산집행 계획

○ 교통신호기 신설 및 보수 잔여예산(190,178천원)은 교통신호기 규제(소방관서 신호체계구축 등) 증가 및 노후시설물 정비에 많은 예산이 소요되어 도급비로 사용하고자 합니다.

설계변경 현황

○ 설계변경 사유 : 시경찰청 규제로 인한 물량 증가, 노후 교통안전시설물 정비에 따른 작업물량 증감 및 추후 공사 예상 물량에(2014년12월 ~ 2015년 2월분) 대한 예산범위 내에서 증액하여 설계변경코저 함

○ 도급비 변경 내용

구 분	도 급 비		변 경 사 유	비 고 (증 감)
	당 초	변 경
2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(1구역)	357,368,000	387,368,000	물량 증감에 따른 금액변경	증)30,000,000
2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(2구역)	408,342,000	568,520,000	물량 증감에 따른 금액변경	증)160,178,000

○ 주요공종 변경 내용

공 종	교통신호기 신설 및 보수공사(연-1구역)			교통신호기 신설 및 보수공사(연-2구역)			비 고
	변경전	변경후	증감	변경전	변경후	증감
제어기 신설 및 교체 등	155	177	22	25	49	24	시공물량 변경
차량신호등, 보행등, 잔여시간, 음향신호기	388	431	43	784	989	205	“
차량,보행지주 설치 및 철거 등	106	251	145	139	157	18	“

○ 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

교통신호기 신설 및 보수, 시설비(401-01)

조치의견

○ 상기와 같이 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1구역)외 1건 공사에 대하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 감리원 실정보고서 각 1부. 끝.