문서번호	도시철도계획부-6960
보존기간	1년
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		경전철설계과장			도시철도계획부장
박준우		진재섭			12/09 박상돈
협조

신림선 책임감리용역 계약기간 조정 검토 보고

c

2014.12.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

신림선 책임감리용역 계약기간 조정 검토 보고

준공기한이 도래한 신림선 경전철 민자사업 전면책임감리용역(1차분)의 계약기간 조정을 검토하여 보고 드림

사업개요

○ 사 업 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역

○ 계약기간 : 2011.11.1 ~ 2016.10.30(1차분 : ’11.11.1 ~ ’14.12.31)

○ 용 역 비 : 10,826,806천원(1차분 : 40,000천원)

○ 공구별 세부계약내용

(단위 : 천원)

구 분	계 약 자	계약일자	계 약 금 액		비고
			총괄	1차
계			10,826,806	40,000
1공구	(주)동부엔지니어링 외 2개사	’11.10.25	2,739,510	10,000
2공구	(주)유신 외 2개사	’11.10.24	3,118,806	10,000
3공구	(주)수성엔지니어링 외 2개사	’11.10.25	2,498,490	10,000
4공구	(주)신성엔지니어링 외 2개사	’11.10.25	2,470,000	10,000

□ 신림선 경전철 민간투자사업

○ 경 유 지 : 여의도～대방역～보라매역～신림역～서울대

○ 규    모 : 총연장 8.06㎞, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

○ 사 업 비 : 8,329억원(기본계획)

○ 사업시행자 : 남서울경전철주식회사(주간사 : 대림산업)

○ 추진경위(요약)

- ’06. 3.10 : 신림선 경전철 민간투자사업 사업제안서 제출

- ’10. 3. 3 : 협상대상자 지정(남서울경전철주식회사)

- ’11.12. 1 : 민간사업자 주간사(고려개발) 워크아웃 신청

- ’12. 3.20 : 남서울경전철(주) 주간사 교체승인(고려개발→대림산업)

- ’13. 7.24 : 도시철도 기본계획에 대한 종합발전방안 발표

- ’13.11.29 : 신림선 민자협상 재개 요청(시→공공투자관리센터)

- ’13.12. 8 : 서울시 10개년 도시철도기본계획 변경(안) 수립

- ’14.11.18 : 사업성 실무협상(공공투자관리센터 주관)

- ’14.12. 현재 : 실시협약안 실무협상 중

현    황

○ 신림선 경전철사업은 당초 ‘11년말 착공계획으로 책임감리용역 사업을 추진하였으나, “서울시 10개년 도시철도 기본계획에 대한 종합발전 방안”에 따라 사업성 등 재검토 후 사업추진계획 재수립․시행

○ ‘14.12.1. 현재 실무재협상을 마무리하고 실시협약안 실무협상 중 임

○ 책임감리 계약체결 공구 중 1개 업체(4공구)만 책임감리원 대기 중 임

※ 책임감리원 타사업 PQ평가 참여 검토보고(‘12.6.25 본부장 방침)

검토결과

○ 책임감리용역(1차분) 계약기간 연기조치

- 연기사유

•신림선 경전철 건설사업의 착수 연기에 따른 책임감리원 투입시기 조정필요

- 위 현황을 고려할 때 책임감리용역 계약기간의 연기가 타당함

○ 계약기간 조정

구 분	총 괄		1차		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경
계약기간	2011.11.1 ~ 2016.10.30	변경없음	2011.11.1 ~ 2014.12.31	2011.11.1 ~ 2015.12.31

- 지체상금 : 미부과 (‘지방자치단체 용역계약 일반조건’ 에 의함)

○ 예산과목 : 도시기반시설본부, 신교통수단도입, 경전철건설사업, 신림선 경전철건설(민자), 시설비 및 부대비, 감리비

조치계획

○ 신림선 경전철 민간투자사업의 책임감리용역 계약기간 연기는 우리시 민간사업 추진계획 재검토 등 에 따른 사항으로 계약기간(1차분) 연기는 우리시 주도로 계약금액 변경없이 시행하고,

○ 과업 착수 시점을 감안 계약자에게 책임감리원 확보토록 조치

○ 책임감리용역 착수 시점에서 책임감리용역의 변동 사항 반영.  끝.