함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인기간 연장 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-28693(2014.12.08.)호 「소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독) 기간 연장 알림」

나. 재난관리과-5764(2014.12.01.)호 「소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 준공검사 지시」

2. 위와 관련하여 우리 서 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수기간이 연장되었음을 알려드리니 현장대응단 및 각119안전센터에서는 시방서 등을 참고로 검수한 후 붙임양식에 의거 2014.12.22.(월)한 제출하시기 바랍니다.

가. 건   명 : 2014년도 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 변경사항 : 검수기간(7일 연장)

구분	검수기간	비고(연장사유)
변경 전	2014. 12. 1 ~ 12. 14	검수수량 과다 (7일 연장)
변경 후	2014. 12. 1 ~ 12. 21

끝.

붙임  1. 2014년도 소방용수시설 도색·보온 대상 및 확인결과 (보고서식) 1부.

2. 소방용수시설 도색공사 결과사진(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 보온공사 결과사진(보고서식) 1부.

4. 도색공사, 보온공사 과업지시서 각 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,을지로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장,충무로119안전센터장
담당자	황순호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	12/09 김성회
협조자
시행	재난관리과-5974	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	부분공개(5)