문서번호	정수과-9571
결재일자	2014.12.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환		현인식	12/10 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

『배출수처리시설 운영관리용역』

변경계약 추진계획

2014. 12

영등포아리수정수센터(정수과)

배출수시설운영관리용역 변경계약 추진계획

2014년 『배출수처리시설 운영관리용역』과 관련하여 보험료 실비정산에 따른 변경계약을 다음과 같이 추진하여 계약업무에 만전을 기하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계약명 : 배출수처리시설 운영관리용역(영등포아리수정수센터)

○ 용역기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

○ 계약상대 : ㈜두현이엔씨 대표 김규열

○ 계약금액(2차수) : 금221,650,680원(총용역부기금액:금442,347,530원)

□ 변경계약 사항

○ 변경계약 내용

- 보험료 정산분 반영(건강보험, 국민연금, 장기요양보험) 및 경비조정

- 감액에 따른 총용역부기금액 조정

○ 세부 변경내역

- 변경금액 : 감액3,785,820원

․ 당초 : 금221,650,680원(총부기금액 금442,347,530원)

· 변경 : 금217,864,860원(총부기금액 금438,561,710원)

- 차수별 금액                                                 (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		442,347,530	438,561,710	감3,785,820원
차수별	1차(2013)	54,458,800	54,458,800	기성
	2차(2014)	221,650,680	217,864,860	감3,785,820원
	3차(2015)	166,238,050	166,238,050	없음

□ 향후 일정

○ 2014. 12. 11 : 변경계약 의뢰(재무과)

○ 2014. 12. 16 : 변경계약 체결

○ 2014. 12. 22 : 준공검사원 접수.

○ 2014. 12. 24 : 준공검사 완료.

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 보험료 납부확인서 1부.  끝.