내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	2014년 도시갤러리 유지보수 용역 계약변경 의뢰

1. 2014년 도시갤러리 유지보수 용역 계약변경 추진계획(디자인정책과-11494, ‘14.12.11)과 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중에 있는 「도시갤러리 유지보수 용역」 건에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 2014년 도시갤러리 유지보수 용역

나. 계약업체 : ******

다. 계약금액 : ***********

라. 계약년월일 : 2014.11.13.

마. 변경내용 : 준공기한 연기

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
과업기간	2014.11.14 ~ 2014.12.13.	2014.11.14 ~ 2014.12.25.	12일 연장

※ 계약금액 변경없음

바. 예산과목 : 디자인역량강화추진, SOFT서울기반구축사업, 문화예술분야 도시시설물유지관리, 일반운영비, 사무관리비

사. 변경사유 : 비, 한파 발생에 따른 보수 진행 지연

아. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

자. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 2014년 도시갤러리 유지보수 용역 계약변경 추진계획 1부.  끝.

	디자인정책과장
주무관	이문자		문화디자인팀장	김지형		디자인정책과장	12/11 유보화
협조자
시행	디자인정책과-11508	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-2715	/전송		/		/	부분공개(7)