투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행 - 2014년 노후포장도로정비 노면표시공사 설계용역

우리 사업소에서 시행 중인 『2014년 노후포장도로정비 노면표시공사 설계용역 』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 노후포장도로정비 노면표시공사 설계용역

나. 용역기간 : 2014.05.19 ∼ 2015.2.28

다. 도 급 자 : ㈜영호이앤씨 대표 정숙영

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총용역비	11,495,000	15,863,000	증)4,368,000
용 역 비	11,495,000	15,863,000	증)4,368,000

마. 설계변경 사유 : 노후포장도로 정비공사 노면표시물량 증가에 따른

설계도면 매수 증가

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물관리

(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

첨부 : 1. 설계변경 검토 보고서(제1회) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부(제1회).  끝.

	도로보수과장
주무관	최정필		도로보수과장	12/16 이규철
협조자	주무관	이상하		주무관	이경남
시행	도로보수과-11234	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개