문서번호	물재생계획과-16105
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
이원영		최승각	12/18 최진석
협조
	하수정비팀장		심형보

2014년 하반기(12월말) 통수능향상 및 노후관로 정비핵심사업 균형성과관리 실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도시안전실

물재생계획과

2014년 하반기(12월말) 통수능향상 및 노후관로 정비

핵심사업 균형성과관리 실적 보고

통수능 향상, 노후･불량관거 정비를 통하여 시민안전과 시설물 내구연한 연장을 위한 '14년 하반기 하수관로 정비사업 추진결과를 보고하고 핵심사업 균형성과관리(BSC) 실적에 반영하고자 함.

□ 추진계획

○ '14년 계획 : 총 86건  243,837백만원

- 하수관로 종합정비사업 : 35개 배수분구 145,432백만원

□ 신규 8건 / 계속 27건

□ 공사 30건 / 설계 5건

- 하수관로 신설개량사업 : 51건 98,405백만원

□ 신규 40건 / 계속 11건

□ 공사 46건 / 설계 3건 / 설계+공사 2건

□ '14년 추진실적

○ 추진기간 : ‘14.1월~11월,12월(예정물량)

○ 계획 대비 실적 : 132% (통수능 향상 131%, 노후불량관 정비 132%)

(단위 : ㎞)

구 분		계 획	실 적	추진율	비 고
합 계		104.4	137.6	132%
통수능향상	소 계	40.5	53.1	131%
	신설개량	23.8	34.9	-
	종합정비	16.7	18.2	-
노후관 정비	종합정비	64.0	84.5	132%

○ 월별 추진실적                                         (단위 : m)

입 력 대 상	3~6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
	61,999	10,580	11,557	15,282	16,522	14,529	7,223	137,692
통수능 향상	21,102	4,911	4,901	6,520	5,675	6,185	3,875	53,169
노후관 정비	40,897	5,669	6,656	8,762	10,847	8,344	3,348	84,523

□ 조치의견

○ '14년 하반기 균형성과관리 핵심성과 실적입력

○ '14년 하수관로 정비사업 최종실적 결과보고 성과관리(‘15년1월)

붙임 2014년 7월~11월,12월(예정) 하수관로 정비실적 6부. 끝.