투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인(문정지구 도시개발사업 조성공사)

1.  SH공사 토목3팀-6313(2014.12.18.)호와 관련입니다.

2.  귀 공사에서 시행하고 있는『문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사』 원인자부담공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사사행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사

나. 공사위치 : 송파구 문정지구 주변도로(동남로, 송파대로, 새말로)

다. 변경사항

공사명	구분	설계	감리	시공사	원인자	공사기간 변경
						당초	변경
문정지구 도시개발사업 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사	노면표시	도로교통공단	도로교통공단	㈜창희이엔에스	SH공사	2014. 4. 8 ~ 2014. 12. 31	2014. 4. 8 ~ 2015. 06. 30

라. 변경사유 : 인허가 협의 및 지장물 철거 지연에 따른 공사 순연.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	SH공사사장,서울송파경찰서장(교통과장),송파구청장(녹색교통과장)
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	전결 12/22 손수희
협조자
시행	도로보수과-7617	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개