문서번호	정수시설과-3841
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	12/22 김동기
협 조
	주무관			최양교
	주무관			곽희영
	주무관			황유진

2014년 세출예산 사고이월 대상사업 보고

2014. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 세출예산 사고이월 대상사업 보고

우리 정수센터의 「자양취수장 취수펌프 개량」 및 「취수장 전력설비 개량」사업이 본부의 자양취수장 긴급 안전진단 시행 및 사업추진 결정 지연으로 계약시기가 늦춰져 사업완수의 절대 공기가 부족하므로 사고이월 조치하고자 함.

Ⅰ		사고이월 사업현황

사고이월 사업현황                                           (단위 : 천원)

사업명	예산현액	지출원인행위액	지출액	사고이월액
계	783,000	507,996	-	507,996
자양취수장 모터펌프 제작구매설치	240,000	89,905	-	89,905
자양취수장 폐쇄형 배전반 제작설치	543,000	355,008	-	355,008
자양취수장 전력설비 개량전기공사		63,083	-	63,083
이월 사유	세월호 사고이후, 본부의 자양취수장 긴급 안전진단 시행, 사업추진 결정 지연으로 사업완수의 절대공기 부족

사업별 발주현황

자양취수장 모터펌프 제작구매설치

- 계약금액 : 89,000,000원(조달수수료 904,680원)

- 계약일시 : 2014.12.12

자양취수장 폐쇄형 배전반 제작설치

- 계약금액 : 352,170,000원(조달수수료 2,837,160원)

- 계약일시 : 2014.12.18

자양취수장 전력설비 개량 전기공사

- 계약금액 : 63,082,020원

- 계약일시 : 2014.11.13

Ⅱ		사고이월 사유

사업 지연 사유

세월호 사고발생에 따라 노후된 자양취수장의 긴급 안전진단 시행 및 정비 계획 결정으로 사업추진이 일시 중단되었으므로 지연되었고,

해당 사업이 안전과 관련된 개량사업으로 취약설비를 대상으로 우선적으로 개량정비토록 시행함에 따른 절대공기 부족으로 사고이월이 필요함.

추진 경과

행정2부시장 방침 제56호(2014.2.28.) 「자양취수장 활용 및 원수료 절감 계획」

- 주요내용 : 기득수리물량 최대 활용을 위한 노후설비 정비추진

기술진단과-3447호(2014.7.2.) 「자양취수장 기전설비 점검결과 보고」

- 주요내용 : 모타펌프 및 밸브류 등의 소손과 노후로 안전사고 우려 상존

기전설비과-5465호(2014.8.13.) 「안전사고예방을 위한 자양취수장 긴급정비 계획」

- 주요내용 : 정비가 시급한 설비(모터펌프, 수배전반)를 금년도 보수예산을 활용하여                뚝도에서 우선 시행, 금년도 예산外 정비는 내년도 생산부 시행

기전설비과-6628(2014.10.2.)호 및 정수시설과-2836(2014.10.16.)호

- 주요내용 : 장래 펌프 배치 및 용량 검토 등

Ⅲ		사업 추진계획

자양취수장 모터펌프 제작구매설치

- 2015.01.  승인도서 접수 및 승인

- 2015.03.  공장검수

- 2015.04.  현장설치완료(납품기한 2015.4.21.)

자양취수장 폐쇄형 배전반 제작설치 및 자양취수장 전력설비 개량 전기공사

- 2014.12.26.  기존 설비 철거

- 2014.12.29.  철거품 반출

- 2014.12.30.  신규 배전반 입고 및 설치공사

- 2015.01.06.  사용전 검사 및 준공(준공기한 2015.01.19.)  끝.