문서번호	시설관리과-34772
결재일자	2014.12.24.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김환	최명익	12/24 나태산
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2014년 종로구 관내 시설공사 등 건설폐기물 처리용역)

2014. 12.

중부수도사업소

시 설 관 리 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리사업소에서 시행중인 “2014년 종로구 관내 시설공사 등 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)에 대하여 시공물량 증,감이 발생됨에 따라 설계변경심의위원회를 개최하여 심의완료 결과를 보고합니다.

1. 공사현황

가. 용 역 명 : 2014년 종로구 관내 시설공사 등 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

나. 용역개요 : ******************************************

다. 용역기간 : 2014.07.02.~2015.06.30

라. 도 급 자 : ****************

2. 설계변경 현황 : 금액변경없음

구 분	설계변경 현황			비 고
	당 초	변 경	증․감
도급비 (VAT포함)	**********	***********	*

3. 설계변경 사유 (물량증감)

가. 공사중 물량 증․감사항 발생

- 아스팔트폐기물운반비(주간)외 5개 공종

4. 심 의 개 최

가. 심의일시 :2014년 12월 24일(수) 오후 16:20~17:00

나. 심의위원

○ 위원장 : 시설관리과장

○ 참석자 : **************************

*******************

다. 심의내용

○ 물량이 증감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

○ 도급액 범위내에서 물량변동

붙 임 : 설계변경내역서 및 심의결과서 1부. 끝.