문서번호	시설관리과-32583
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		소장
김대용	이철구	이시우		12/24 정운진
협 조
	주무관		김덕기

(구)구의취수장 도수관로 폐쇄공사 실정보고

2014. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

(구)구의취수장 도수관로 폐쇄공사 실정보고

(구)구의취수장 도수관로 폐쇄공사의 일반회계 예산을 사전 원인행위  하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 동부 관내 긴급 누수 복구공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 2014. 6. 23 ~ 2015. 6. 30

○ 계약금액 : 총2,709,136천원

○ 계약상대자 : ㈜대맥건설 대표 현종식

□ 추진경위

○ ‘14. 9. 26   : 구의취수장내 도수관로 폐쇄(D=1,650mm×1개소)

(본부장방침 생산관리과-10662)

○ ‘14. 11. 7   : 문화정책과에서 구의취수장내 도수관로 폐쇄 의뢰

(본청 문화정책과-13681)

○ ‘14. 11. 24  : 구의취수장내 도수관로 폐쇄공사 착수

○ ‘14. 12. 19  : 우리사업소로 예산배정(일반회계 43,890천원)

- 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울 구현, 문화향유공간 및 문화기반시설조성, 미래유산 보존 및 활용 사업, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 공사현황

① 배관망도(폐쇄)		전경사진
구의2취수장 구의1취수장 도수관로 맹판 (D1650㎜)

□ 현황 및 문제점

○ 도수관로 폐쇄를 위해 구의아리수정수센터에 단수의뢰하였으나 본부(배수과)로부터 본부(고도정수반)에서 추진중인 구의정수센터 고도정수처리시설 시운전 일정과 중복되어 급수운영에 차질이 있을 것으로 판단하여 본 공사를 ‘15년 1월에 추진 요청

○ 본부(배수과)에서 1월에 공사(폐쇄)요청에 의거 작업기간이 ‘15. 2. 15.까지 공사후 정산처리하여야 하므로 ‘14년 12월에 사전 원인행위를 시행하여야 할 실정임.

□ 조치사항

○ 상기와 같은 사항으로 아래와 같이 작업지시하고 ‘14년 12월 사전 원인       행위를 시행코자함.

< 작업지시 내용 >

- 위    치 : 구의취수장내

- 작업내용 : 도수관로 폐쇄 D=1,650mm, 1개소

- 작업기간 : 2014. 12. 26 ~ 2015. 2. 15

- 금회 공사비 : 43,890,000원

▢ 행정사항

○ 본 공사에 집행되는 예산은 일반회계로 ‘14월 12월에 원인행위를 시행하고       ’15년 공사완료 후 정산에 반영하여 공사에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 작업지시서 1부. 끝.