문서번호	택시물류과-34905
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	택시정책팀장	택시물류과장		교통정책관
박노산	최한철	김규룡		전결 12/19 백호
협 조	신문팀장		강옥현
	법제심사팀장		주재완

도시계획시설사업 실시계획변경 계획

<동남권유통단지 조성사업 관련>

2014. 12.

서 울 특 별 시

(택시물류과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

도시계획시설사업 실시계획변경 계획

<동남권유통단지 조성사업 관련>

서울동남권유통단지 조성사업과 관련하여 광역교통개선대책의 일환으로 추진중인 도시계획시설(도로)사업의 원할한 사업추진을 위하여 시행자의 대표자 변경, 사업기간 연장 등 실시계획을 변경하고자 함

1				사업개요

□ 유통단지진입도로(광로3-1)

○ 규    모 : 길이 719m, 폭 40m 신설

○ 사 업 비 : 402억원 (시비 159억, 국비 159억 포함)

○ 현 공 정 : 8개 차로 중 6개 차로 완료 (개통)

○ 추진경위

- ‘05. 5.31      도시계획시설(도로) 결정

- ‘06. 6.16      도시계획시설사업 실시계획인가

- ‘07. 3.        공사착수

□ 탄천서측도로(중로 1-428, 방수설비, 철도)

○ 규    모 : 길이 1,250m, 폭 20m 신설

○ 사 업 비 : 244억원

○ 현 공 정 : 토지수용 및 지장물 철거중

○ 추진경위

- ‘07.11.29      도시계획시설(도로) 결정

- ‘08. 6.19      도시계획시설사업 실시계획인가

- ‘11. 2.        토지수용 및 공사착수

2				변경승인내용

□ 관련법률 : 국토의 계획 및 운영에 관한 법률 제88조

□ 변경승인 내용

【공통사항】

○ 시행(대행)자의 대표자 변경

- SH공사 이종수 → SH공사 변창흠

【사업별 변경내용】

○ 유통단지진입도로(광로 3-1)

- 준공예정일 변경 : 2014.12.31. → 2015.12.31. (1년 연장)

▷ 문정 도시개발사업과 연계하여 추진하기 위해 준공예정일 연장

○ 탄천서측도로(중로 1-428, 방수설비, 철도)

- 준공예정일 변경 : 2014.12.31. → 2015.12.31. (1년 연장)

▷ 율현2 빗물펌프장 철거지연에 따른 준공예정일 연장

3				행정사항

○ 실시계획변경 고시 (시보)

- 도시계획시설(광로3-1)사업

- 도시계획시설(중로1-428), 방수설비, 철도)사업

따로붙임 : 1) 도시계획시설(광로3-1)사업 실시계획변경 고시문(안) 1부

2) 도시계획시설(중로1-428, 방수설비, 철도)사업 실시계획변경 고시문(안) 1부.  끝.