관급자재 납품기한 연장내역서(목록)

□공 사 명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□연기사유 : 공정계획변경에 의한 소요시기 변경

관급자재계약현황					기검 수량	검수 잔량	납품기한 연기		비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호			당초	변경
도복장강관	ø400	m	54.9	12-12-1-02063-00	12.2	42.7	2014-12-31	2015-12-31	전체
	ø500	본	45	12-10-1-51640-02	36	9
	ø600	m	54.9	12-12-1-02063-00	30.5	24.4
	ø700	m	140.3		18.3	122.0
	ø1000	본	72	12-10-1-51640-02	37	35
	ø1350	본	99		60	39
	ø1500	본	42		37	5

공기밸브	ø100	ea	7	12-12-1-02058-00	1	6	2014-12-31	2015-12-31	전체
제수밸브	ø100	ea	1	12-10-1-52992-01	-	1
	ø600	ea	1	12-12-1-02059-00	-	1
버터플라이밸브	ø1000	ea	2	12-10-1-53624-02	-	2

아스팔트콘크리트	BC-1,t20mm,3등급,중간층용	톤	500	12-14-1-15823-00	-	500	2014-12-31	2015-02-28	4차
	WC-4,t20mm,3등급,표층용	톤	250		178.7	71.3
	BB-2,t30mm,3등급,기층용	톤	1,000		262	738
	BC-1,t20mm,3등급,중간층용	톤	590	12-14-1-15823-00	-	590
	BB-2,t30mm,3등급,기층용	톤	1,007		-	1,007

레미콘	25-27-15	m3	2,077	12-14-1-15985-00	1,699	378	2014-12-31	2015-02-28	4차
	25-18-08	m3	239		238	1
	25-18-15	m3	178		177	1
	25-21-08	m3	182		118	64
	25-21-12	m3	165		76	89
	25-24-15	m3	128	12-14-1-53728-00	-	128
	25-18-08	m3	92		-	92
	25-18-12	m3	30		-	30
	25-21-15	m3	59		-	59
	25-27-15	m3	2,300	12-14-1-15985-00	786	1,514
	25-18-15	m3	100		39	61

시멘트	보통포틀랜드(1종)	포	2,124	12-14-1-16298-00	-	2,124	2014-12-31	2015-02-28	4차

콘크리트관	원심력철근콘크리트관,보통관B2,ø300x2500	본	4	12-14-1-16300-00	-	4	2014-12-31	2015-02-28	4차

콘크리트관	진동및전압철근콘크리트관,A2,ø600mmx2500mm	본	126	12-14-1-16301-00	-	126	2014-12-31	2015-02-28	4차

석재블록	자연석경계석,UN-A34, 200x250x1000, 보차도용, 곡선,모따기30R	개	14	12-14-1-16305-01	-	14	2014-12-31	2015-02-28	4차
	자연석경계석,UN-A44, 200x(250-100)x1000 횡단 보도용,직선경사,모따기30R	개	16		-	16
	자연석경계석,UN-A48, 150x150x1000mm, 도로용 경계석,직선,모따기10R	개	89	12-14-1-53626-00	40	49

강판	일반구조용압연강판, ABT-02, 20x100x225mm, 파형강판(대골형) 앵커볼트	개	430	12-14-1-16206-00	-	430	2014-12-31	2015-02-28	4차
	일반구조용압연강판, BSC-02, 157x175x38mm, 파형강판(대골형) 베이스찬넬	m	163.5		-	163.5