관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(도복장강관) 납품기한 연기                                               작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
도복장강관	ø400	m	54.9	12-12-1-02063-00	동양철관(주)	12.2	42.7	2014-12-31	2015-12-31	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	전체
	ø500	본	45	12-10-1-51640-02		36	9
	ø600	m	54.9	12-12-1-02063-00		30.5	24.4
	ø700	m	140.3			18.3	122.0
	ø1000	본	72	12-10-1-51640-02		37	35
	ø1350	본	99			60	39
	ø1500	본	42			37	5

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(공기밸브, 제수밸브, 버터플라이밸브) 납품기한 연기                      작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
공기밸브	ø100	ea	7	12-12-1-02058-00	신진정공(주)	1	6	2014-12-31	2015-12-31	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	전체
제수밸브	ø100	ea	1	12-10-1-52992-01		-	1
	ø600	ea	1	12-12-1-02059-00		-	1
버터플라이밸브	ø1000	ea	2	12-10-1-53624-02	㈜현대밸브	-	2

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(아스팔트콘크리트) 납품기한 연기                                         작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
아스팔트콘크리트	BC-1,t20mm,3등급,중간층용	톤	500	12-14-1-15823-00	㈜산하	-	500	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차
	WC-4,t20mm,3등급,표층용	톤	250			178.7	71.3
	BB-2,t30mm,3등급,기층용	톤	1,000			262	738
	BC-1,t20mm,3등급,중간층용	톤	590	12-14-1-15823-00	일진아스콘(주)	-	590
	BB-2,t30mm,3등급,기층용	톤	1,007			-	1,007

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(레미콘) 납품기한 연기                                                  작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
레미콘	25-27-15	m3	2,077	12-14-1-15985-00	우림콘크리트공업(주)	1,699	378	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차
	25-18-08	m3	239			238	1
	25-18-15	m3	178			177	1
	25-21-08	m3	182			118	64
	25-21-12	m3	165			76	89
	25-24-15	m3	128	12-14-1-53728-00		-	128
	25-18-08	m3	92			-	92
	25-18-12	m3	30			-	30
	25-21-15	m3	59			-	59
	25-27-15	m3	2,300	12-14-1-15985-00	흥국산업(주)	786	1,514
	25-18-15	m3	100			39	61

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(시멘트) 납품기한 연기                                                   작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
시멘트	보통포틀랜드시멘트 (1종)포장40kg	포	2,124	12-14-1-16298-00	성신양회(주)	-	2,124	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(원심력철근콘크리트관) 납품기한 연기                                     작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
콘크리트관	원심력철근콘크리트관,보통관B2,ø300mmx2500mm	본	4	12-14-1-16300-00	동양콘크리트산업(주)	-	4	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(진동 및 전압철근콘크리트관) 납품기한 연기                               작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
콘크리트관	진동및전압철근콘크리트관,A2,ø600mmx2500mm	본	126	12-14-1-16301-00	홍익콘크리트산업(주)	-	126	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(석재블록) 납품기한 연기                                                 작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
석재블록	자연석경계석,UN-A34, 200x250x1000mm, 보차도용,곡선,모따기30R	개	14	12-14-1-16305-01	㈜운암산업	-	14	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차
	자연석경계석,UN-A44, 200x(250-100)x1000mm, 횡단보도용,직선경사,모따기30R	개	16			-	16
	자연석경계석,UN-A48, 150x150x1000mm, 도로용경계석,직선,모따기10R	개	89	12-14-1-53626-00		40	49

관급자재 납품기한 연장내역서

□공사명 : 천호대로(광나루역)확장공사

□건  명 : 관급자재(강판) 납품기한 연기                                                     작성일 : 2014.12.23 현재

관급자재계약현황						기검수량	검수잔량	납품기한 연기		연기사유	비고
품명	규격	단위	계약수량	납품요구번호	계약자			당초	변경
강판	일반구조용압연강판, ABT-02, 20x100x225mm, 파형강판(대골형) 앵커볼트	개	430	12-14-1-16206-00	평산에스아이(주)	-	430	2014-12-31	2015-02-28	공정계획변경에 의한 소요시기 변경	4차
	일반구조용압연강판, BSC-02, 157x175x38mm, 파형강판(대골형) 베이스찬넬	m	163.5			-	163.5