문서번호	생태공원과-3056
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
양순옥		최병언	12/29 차광재
협조
	주무관		서은교

『양화한강공원 친수공간 조성공사』

실정보고사항 검토 보고(10회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

한강사업본부

(생태공원과)

『양화한강공원 친수공간 조성공사』

실정보고사항 검토 보고(10회)

『양화한강공원 친수공간 조성공사』시행중 공사감독부서인 시설관리공단의 실정검토 사항에 대하여 검토결과를 보고드림.

⇒ 공사감독3처-13194(2014.12.26)

공사개요

공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사

공사기간 : 2013.12.27 ~ 2015.04.15

도 급 비 : 3,352,552,000원(총차)

도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종, 정나라건설(주) 대표 이완규

실정사항 검토결과

현장실정 검토내용(조경)

분야별	현 황	실정보고 내용	검토결과
식 재 공	□ 화장실 선체검수는 부유체와 화장실 본체의 시공이 완료된 후에 검수가 시행됨 □ 현재 부유체 시공은 1차분 공사, 화장실 본체 시공은 2차분 공사에 반영되어 선체검수를 1차분 공사에서 시행할 수 없음	□ 1차분 공사에 반영된 선체검수 비용을 준공(1차분)시 정산 감액하고 2차분 공사에 반영 - 화장실 선체검수비용 정산금액 : 2,981,000원	실정보고 내용반영

보고자 의견

실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 공사감독부서로 실정검토내용과 같이 승인 통보하고 추후 준공정산(1차분) 및 설계변경(2차분)시 정산처리하고자 함.

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 관련문서 1부.  끝.