투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울노원경찰서장(경비교통과장)
(경유)
제목	공사중 교통안전 시설물 변경설치 기간연장 요청

1. 우리시에서 시행중인『동부간선도로 확장공사(3공구)』와 관련입니다.

2. 위 공사를 시행하면서 서울지방경찰청 교통관리과-16699(14. 6.19.)호로 상계근린공원 방음벽설치구간(Sta.4+555∼5+029)에 대한 공사중 교통처리계획에 따라 일부 교통안전시설물 변경설치에 따른 기간이 완료되어 아래와 같이 연장 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

-     다     음     -

가. 공사개요

- 위  치 : 노원구 상계근린공원∼현대아파트(L=480m)

- 내  용 : 방음벽 공사

- 기  간 : 당초 2014. 6.10. ∼ 2014.12.31.(205일)

변경 2014. 6.10. ∼ 2015. 2.28.(59일 연장)

나. 사  유

- 방음벽 기초형식 변경 및 방음벽 연장 추가

- 배수처리 형식 변경 및 동절기 공사로 인한 공기지연 등

붙  임 : 위치도 및 교통처리 계획평면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		교량건설과장	이동훈		토목부장	01/05 노우성
협조자	주무관	장종환
시행	토목부-155	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	topseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개