문서번호	시설과-360
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김영수	김영백	이종한	01/16 이용태
협 조

남산공원 남측순환로 정비공사 시행계획

2015. 01. 16.

중부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

2015 남산공원 남측순환로 정비공사 시행계획

2015년 남산공원 남측순환로 정비로 주행 및 보행환경을 개선

하여 공원이용자의 편의과 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

1		사 업 개 요

남측순환로 포장 현황

도로 종류	순환로 형식			석축 배수로			포장년도
	면적 (ⓐ)	연장 (m)	폭 (m)	연장 (m)	폭 (cm)	높이 (cm)
아스팔트	약150	3,450	4~7	2,630	70	70~80	1960년대 군부대 진입로 포장(추정)

남측순환로 포장 단면 현황

순환도로 포장단면
포 장 단 면		석 축 배 수 로

2013~2014년 남측순환로 정비실적 현황

위    치 : 남측순환로 내림막 구간(

개    요 : 아스팔트포장 1.45km(58@), 배수로설치 1.00km

사업기간 : 2013. 7 ~ 2014. 11

사 업 비 : 1,100백만원

2015년 남측순환로 정비계획

위    치 : 남측순환로 오르막 구간

(국립극장앞 매표소 → 팔각주차장 2.0Km)

개    요 : 아스팔트포장 2.0km(77@), 배수로설치 1.5km

사업기간 : 2015. 01 ~ 2015. 11

사 업 비 : 1,500백만원

세부사업 추진일정

2015.01 : 사업계획수립 및 기술용역타당성 심사

2015.02 : 실시설계용역 시행

2015.03~04 : 계약심사요청 및 공사발주

2015.05~11 : 공사시행 및 준공

2		행정사항

『2015년 남산공원 남측순환로 정비공사』에 대하여 실시설계

용역 시행후 계약심사 및 사업시행.

예산과목 : 남산 및 산하공원 보수정비사업(보수정비), 시설비(401-01)끝.