투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	관급자재(스틸그레이팅) 납품기한 연기 요청

1. 관리과-12199(2014.12.29)호와 관련입니다.

2. 『2014년 센터내 시설물유지보수공사』와 관련 관급자재를 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 센터내 시설물유지보수공사(연간단가)

나. 연기사유 : 사용시기 미 도래

다. 납품기한 연기내역

납품요구번호	계약자	품명	규격	당초		납품기한
				수량	금액	당초	변경
12-14-1-61793-00	㈜태흥그레이팅	스틸그레이팅		1,700개	99,110,000	2015. 1. 25.	2015. 2. 6.
계					99,110,000
조달수수료(0.54%)					508,430
합 계					99,618,430

라. 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터 공통분야유지보수,

시설비.  끝.

	물재생과장
주무관	김민호		시설팀장	권순회		물재생과장	01/21 김일운
협조자	주무관	강희석
시행	물재생과-211	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8580	/		/	대시민공개