문서번호	소방행정과-1040
결재일자	2015.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
강평수	김경태	이경일		01/27 김용준
협 조
	현장대응단장		정재룡

현장대응단 사무공간 조성공사 추진계획

2015. 1.

은평소방서

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

현장대응단 사무공간 조성공사 추진계획

재난현장 대응력 강화를 위한 조직개편과 관련하여 우리소방서에 현장대응단이 신설됨에 따라 기존 진관119안전센터 사무실을 확장하여 현장대응단 사무공간을 새롭게 조성하고자함

Ⅰ		추진근거

□ 소방행정과-32005(2014.12.18.)호『현장대응력 강화를 위한 소방조직 개편 알림』

□ 소방행정과-1420(2015.1.19.)호『2015년도 세입·세출 예산

편성 결과 알림』

Ⅱ		건축물 현황

□ 위    치 : 은평구 통일로 962(진관동 120)

□ 규    모

❍ 구    조 : 철근콘크리트조, 지하1층 지상4층

❍ 연 면 적 : 5,189.09㎡ (대지면적 6,770.5㎡)

❍ 준 공 일 : 2011.09.30.

Ⅲ		사업개요

□ 사 업 명 : 은평소방서 현장대응단 사무공간 조성공사

□ 사업기간 : 2015.01.27. ~ 02.28.

□ 사업규모 : 은평소방서(본서) 청사

❍ 현장대응단 사무실 확장공사(건축, 폐기물)

❍ 동력, UPS, 간판, 차고문  등 판넬이설 및 전등교체 공사(전기)

❍ 지령수보대 이설 및 선로공사(통신)

❍ 옥내소화전 및 휀코일 이설공사(설비)

□ 총사업비 : 금57,000천원

❍ 시설비 : 48,000천원

❍ 자산및물품취득비 : 9,000천원

Ⅳ		추진계획

□ 추진일정

구분	추진기간	세부추진내용
설계	2015.01.27. ~ 02.06.	○ 기술용역 타당성 심사 ○ 설계용역 발주 및 준공
공사	2015.02.09. ~ 02.28.	○ 공사계약 ○ 공사착공 및 준공

□ 추진방법

❍ 계약방법 : 수의계약 등

❍ 계약근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

- 행정자치부 예규 제3호(2014.12.19.)『지방자치단체 입찰 및

계약 집행기준』제5장 수의계약 운영요령

Ⅴ		기대효과

□ 기존 진관119안전센터 사무공간을 33.75㎡를 확장하여 현장대응단 사무공간 확보

□ LED조명, 책상 및 파티션 등 사무비품 교체를 통하여 현장대응단 근무환경 개선

붙임  1. 벽면철거 관련 구조안전성 확보 질의회신 1부.

2. 조직개편 관련 사무공간 재배치(안) 1부.  끝.