문서번호	기전과-846
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		김대진	01/29 송상영
협조

위례터널 기전시설물 시운전 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01

동부도로사업소

(기 전 과)

위례터널 인수전 기전시설물 시운전 계획

위례터널 기전시설물에 대하여 인수전 시운전을 실시하여 기전시설에 대한

고장 조기발견, 보수로 향후 터널 인수시 운영에 철저를 기하고자 함

□ 추진목적

○ 터널개통전 기전시설 및 운영시스템 안정화

○ 기전시설 미비사항 조기발견, 보수로 최적시설 유지

□ 위례터널 시설현황

○ 위치 : 강남구 세곡동~성남시 수정구 복정동

○ 규모 : 터널(왕복 4차로) 연장 2,362M(서울 1,406M, 성남 956M)

○ 주요 기전시설

- 조명시설 : LED등 2,312조

- 영상감시설비 : CCTV 32대, 영상유고, 원격제어시스템

- 제연, 방재설비 : 20대(제트팬), 소화기 76개소․소화전 30개소

- 배수설비 : 수중펌프 11대 (집수정 3개소 - 지하수처리1, 우수처리2)

- 비상발전기 : 2대(750Kw, 660Kw)

□ 민간위탁 개요

○ 민간위탁 관리 운영기간 : 2015. 4 ~ 12월(9개월)

○ 위탁비용(추정) : 총 739백만원(서울시 480, 성남시 259)

○ 추진현황

- ’14.10.30 : 위례터널 관리방안 검토(도로계획과-14052호)

- ’14.11.26 : 위례터널 시설물 유지관리 관한 협약서 체결(우리시⇔성남시)

- ’14.12.31 : 위례터널 운영관리 추진계획(도로시설과-22579호)

- ’15.01.09 : 민간위탁 운영평가위원회 심의(조직담당관, 적정)

○ 향후 추진일정

- ’15.02.  : 시의회 동의

- ’15.03.  : 위례터널 운영관리 용역발주 및 계약(동부도로사업소)

- ’15.04.  : 위례터널 운영관리 합동근무(서울시, LH)

- ’15.05.  : 위례터널 민간위탁 운영관리

□ 시운전 추진계획

○ 시운전 기간 : 2015.2.2. ~ 3.31(2개월)

○ 시운전 점검내용

구분	시설명	점검주기	주요 점검내용	비고
개 별 시운전	조명등	매일	원격제어, 자동 단계별 점소등 상태
	영상감시설비	매일	원격제어, 동작상태
	제연, 소방설비	매일	동작상태
	배수펌프	매일	동작상태
	비상발전기	주 1회	동작상태
종 합 시운전	기전시설 합동점검	총 3회	정전 등 돌발상황 발생시 기전설비 동작상태 등	2월 3일 3월 3일 3월24일

○ 근무방법

- 위례터널 상황실 1일 출장근무(4시간) : 13:00~17:00

- 시운전사항 결과 1일 메모 보고

○ 근무자 배치 : 2명(전기1, 기계1)

- 근무자 : 전기6급 김동욱(신원지하차도), 기계7급 이태현(상황실)

□ 행정사항

○ 시운전 계획 LH 통보 및 근무자 배치

○ 시운전중 미비사항 발주처 보완 요청.