보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	代권영안	01/30 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-2407

광진구 상수도공사 감독업무 수행중 *************** 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 01. 30.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	**************	***	2015.01.14.~2015.01.30.	신설-464	신축
2	************	***	2015.01.23.~2015.01.30.	신설-479	신축
3	**************	***	2015.01.23.~2015.01.30.	신설-480	신축

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간	요청인
1	**************	***	신축현장 타공정 지연에 따른 공사연기 요청	2015.02.04.	***
2	************	***	신축현장 타공정 지연에 따른 공사연기 요청	2015.02.03.	***
3	**************	***	신축현장 타공정 지연에 따른 공사연기 요청	2015.02.04.	***

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 신축현장내 타공정 지연에 따른 현장사정에 따라 공사 연기요청이 있어 공사기간 내 공사가 어려워 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	**************	***	2015.01.14.~2015.01.30.	2015.01.14.~2015.02.04.
2	************	***	2015.01.23.~2015.01.30.	2015.01.23.~2015.02.03.
3	**************	***	2015.01.23.~2015.01.30.	2015.01.23.~2015.02.04.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 3부.(따로붙임) 끝.