몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성 공사

(국제교류담당관 / 동부공원녹지사업소 시설과)

□ 사업개요

◦위치 : 몽골 울란바타르시 남부 비얀주르크 국립공원내

◦규모 : 862.0㎡

◦기간 : 2014.12.23 ～ 2015.6.30. (공정율 0%)

◦총사업비 : 200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 국제협력계정, 기조실 국제교류담당관, 국제교류협력추진, 외국지방 정부 문화 등 교류, 몽골 어린이놀이터 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		200,000,000	200,000,000	185,841,840	15,770,000	184,071,840 (14,000,000)	158,160
공 사 비		-	-	170,071,840	0	170,071,840 ( 0 )	-
	도 급 비	-	-	97,800,900	0	97,800,900 ( 0 )	-
	관 급 비	-	-	72,270,940	0	72,270,940 ( 0 )	-
설 계 비		-	-	15,770,000	15,770,000	0 ( 0 )	-
이전비․기타		-	-	0	0	14,000,000 (14,000,000)	-

◦이월사유

- 해외에 조성하는 공사건으로 부지선정, 공사내용 및 협약서 체결 등 협의 기간 소요

- 12월에 발주된 사업으로 몽골 울란바타르시 현지로 자재 통관 등 절대공기 부족

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성공사

□ 사업기간 : 2014.12.23.~2015.06.30

□ 예산과목 : 국제협력계정, 기조실 국제교류담당관, 국제교류협력추진, 외국지방 정부 문화 등 교류, 몽골 어린이놀이터 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 지출원인행위 미필사유

- 몽골 현지에 조성하는 공사로서 지하에 매설된 관수시설 이설비 발생 등

- 기존 휀스 철거 및 이설, 기존 지피류 이설 등

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		14,000,000
기존 관수시설 이설	관수시설 이설 140m × 50,000원/m = 7,000,000원	7,000,000
기존 휀스 철거 및 이설	휀스 철거 및 이설 100m × 30,000원/m = 3,000,000원	3,000,000
기존 지피류 이설	지피류 이설 8,000㎡ × 500원/㎡ = 4,000,000원	4,000,000

확 인 자 :   직) 시설과장       성명) 진 병 규 (인)

조 사 자 :   직) 녹지주사보     성명) 김 재 희 (인)