문서번호	자연생태과-2046
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
이정수	양경규	최현실		02/03 오해영
협 조

2015년 중랑천 녹색브랜드화 사업 추진계획

2015. 2.

푸른도시국

(자연생태과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	성동구 등 7개 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2015년 중랑천 녹색브랜드화 사업 추진계획

도심속 주요 생태축인 중랑천 명소화를 위해 구역별 특성에 맞게

녹음터널, 장미원 자생식물 단지, 초화원 등으로 조성하여 동부권역

균형발전에 기여함은 물론 시민들이 즐겨찾는 관광명소로 제공

Ⅰ		추진근거

중랑천변 그늘 제공 활엽수 식재 검토 시장 요청(‘13.4.15)

중랑천 특화‧브랜드화 추진계획 시장보고(‘13.6.26)

중랑천 녹색브랜드화 추진계획 수립(‘13.7.18 시장방침)

중랑천 녹색브랜드화 기본계획 수립(‘14.4.7)

Ⅱ		사업개요

추진기간 : 2013 ~ 2016년(4년간 연차적 추진)

사업규모 : 중랑천 19.3㎞(의정부 시계 ~ 한강 합류점)

사업내용 : 제방 산책길, 둔치 체육시설 및 자전거길 주변 녹음수 식재, 장미원, 자생 초화원, 쉼터 조성 등

총사업비 : 8,315백만원(‘13년 1,208, ’14년 2,738, ‘15년 1,854, ’16년 2,515)

추진기관 : 7개 자치구(도봉, 노원, 성북, 중랑, 동대문, 성동, 광진구)

연차별 식재계획

구 분	계	2013년	2014년	2015년	2016년
수 목(천주)	385	17	58	125	185
초화류(천본)	3,491	857	884	850	900

※ 2014년에 수목 58,157주(교목 2,454주, 관목 55,703주), 초화류 884천본 식재

Ⅲ		‘15년 추진계획

추진개요

위    치 : 중랑천(성동구 송정제방 등 8개소)

사업규모 : 125,300㎡

사업내용 : 녹음수 및 초화류 식재, 장미원 조성 등

사업기간 : 2015. 1 ~ 12월

사 업 비 : 1,854백만원(시설비)

추진기관 : 6개 자치구

사업대상지

자치구별	사 업 내 용	규모(㎡)	사업비(백만원)	비 고
계	8개소	125,300	1,854
성 동 구	▸위치 : 중랑천(응봉교~용비교) ▸내용 : 식재기반조성 및 초화류 식재	2,500	150
	▸위치 : 중랑천(송정제방 일대) ▸내용 : 덩굴장미 아치, 사계장미 식재	700	150
	▸위치 : 중랑천(용비교~응봉교) ▸내용 : 자전거길 주변 수목 식재	3,000	200
광 진 구	▸위치 : 중랑천(군자교~장평교) ▸내용 : 초화류 단지 조성	56,000	100
동대문구	▸위치 : 중랑천(군자교~이화교) ▸내용 : 둔치 수목 및 초화류 식재	19,600	200
중 랑 구	▸위치 : 중랑천(월릉교~장평교) ▸내용 : 제방길 녹음수 및 사계장미 식재	15,000	454
도 봉 구	▸위치 : 중랑천(녹천교~의정부 시경계) ▸내용 : 둔치 수목 및 초화류 식재	18,000	300
노 원 구	▸위치 : 중랑천(월릉교~의정부 시경계) ▸내용 : 둔치 수목 및 초화류 식재	24,000	300

추진일정

사업추진 계획 수립‧통보(자연생태과 ⇨ 자치구) : ‘15. 2월

기술용역 타당성심사(자치구 ⇨ 기술심사담당관) : ‘15. 2월

- 설계용역 타당성심사 결과 첨부(수리검토비 포함)하여 설계비 재배정 요구

실시설계 용역시행(자치구)                      : ‘15.2~5월

- 기 시달한 중랑천 녹색브랜드화 기본계획에 맞추어 설계반영

- 중랑천 녹색브랜드화 추진 수목 식재 계획 지침에 의거 수종,규격 등 선정

- 중랑천 하천기본계획을 기준으로 수목식재 수리검토 시행 및 하천 관련 부서 협의

설계심의(자치구 ⇨ 자연생태과)                : ‘15.4~5월

- 설계심의는 설계공정 70%정도 진행 시 자연생태과에 요청

- 설계심의는 대상지 여건 및 현황 등에 따라 현장 심의 가능

계약심사(자치구 ⇨ 계약심사과)                : ‘15.4~6월

- 공사금액이 3억(조경)이상인 경우 시 계약심사과 심사 의뢰

- 공사금액 3억(조경) 미만은 기관 자체 일상감사 실시

- 심의결과 첨부하여 자연생태과에 공사비 재배정 요구

공사시행(자치구)                             : ‘15.5~11월

- 자치구별 추진하는 공사는 연내 공사완료를 목표로 추진

추진지침

중랑천 전 구간을 구역별 특성에 맞게 특화 및 브랜드화

- 제방상부 식재수종 다양화 및 녹음 터널, 장미원 등 조성

- 둔치 체육시설, 산책로, 자전거길 주변 그늘 나무식재 및 의자설치

- 제방 호안 경사면 및 둔치 공지 자생식물 단지 및 초화류원 조성

- 하천 경관 저해시설(합류부 등) 정비 및 동산간선도로 차폐수목 식재

하천의 홍수관리 등 치수적 측면에서 중요부는 큰나무 심기 제한

- 수리계산이 필요없는 곳에 허용 식재 밀도를 고려하여 식재

- 하천 제외지내 큰나무 식재시는 실시설계 용역시 수리전문가 자문을 받아 시행

기타 하천생태복원 추진 관련 관련지침 준수

- 하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토해양부, 2007)

- 생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)

Ⅳ		행정사항

사업착공 및 준공시 5일 이내 사업내역 첨부 보고

보도자료 제공, 준공식 등은 시(자연생태과) 사전 협의

첨  부 : 사업착공 및 준공보고 서식 1부.

[붙임1]

○○○ 사업 착공 보고서

○ 공 사 명 :

○ 위    치 : ○○구  ○○동  ○○번지 일대 (000 ~ 000구간)

○ 공사기간 : 2015.   .   .~    .    .    .

○ 시 공 사 :

○ 공사금액 :       천원

- 도급:   천원,     관급:    천원,   기타:    천원

○ 공사내용 – 구체적으로 기재

-

-

-

-

○ 조성 대상지

위 치 도	현장사진

[붙임2]

○○○ 사업 완료 보고서

○ 공 사 명 :

○ 위    치 : ○○구  ○○동  ○○번지 일대 (000 ~ 000구간)

○ 사업기간 : 2015. ○.○~○.○

- 설계 : ○.○~○.○      , 공사 : ○.○ ~ ○ ○

○ 공사내용(구체적으로 기재)

-

-

-

○ 시민참여 실적 : 주민설명회 등(설계부터 완료까지 사항)

○ 언론보도 사항 : 보도자료 배포, ○○언론사 등 보도

○ 예산집행내역

(단위 : 천원)

예산과목	재배정액	집행액	잔 액
			소 계	집행잔액	낙찰차액
합 계
시 설 비
설계용역비

○ 준공사진

공사전	공사후