공사 설계 변경 심의 의뢰서

안건번호	제2015 - 호
구 분	토 목

공 사 명	2014년 동작, 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

심의일시 :	2015.02.09(월
심의장소 :	시설관리과사무실

요 청 기 관 명	남부수도사업소(시설관리과)
제 출 년 월 일	2015년 02월 일

설계변경 심의 설명서

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 2014년 동작, 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

◦ 공사개요

- 노후 밸브 및 철개 교체 155개소,   소화전신설:39개소

◦ 공사기간 : 2014. 4. 14 ~ 2015. 4. 30.

◦ 도 급 자 : 천윤건설 대표 정수철

◦ 설계 변경 금액(도급액)

- 당초 : 720,510,000원

- 변경 : 719,851,000원(감659,000)

□ 설계변경 근거

◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약 금액 조정)

□ 설계변경 사유

◦ 공사현장에 맞는 적합한 시공으로 인한 계약물량 증감 발생

◦ 퇴직공제부금 및 건설기계대여금 실정산

□ 설계심사(변경) 보고

◦ 본 공사의 설계 변경 사유로 인한 설계변경 내역서의 단가산출의 적정성 여부 등을 검토하여 의견을 제시하여 주시기 바랍니다

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부.  끝.

설계변경 심의 의결서

◦ 공 사 명 : 2014년 동작, 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

(장기계속단가계약)

◦ 상기 공사 시행중 현장여건 변화에 의한 물량증·감 등에 따른 설계변경내역서(제4회 최종)에 대한 심의 결과 다음과 같이 의견을 제시하고 의결함.

□ 심의 의결 내용 : 본안 통과,  보류,  부결.

구 분	직 위	의 견	확 인	비 고
위 원 장	시설관리과장
위 원	급수운영과 이경희
위 원	급수운영과 강동길
위 원	급수운영과 강동철
간 사	시설관리과 김대성

◦ 설계변경에 대한 수급사 의견 :

2015.  02. 09.

입회자 :	공사감독 :	지방시설주사	성명 : 이 승 영(인)
	수 급 사 :	천윤건설 대표	성명 : 정 수 철(인)