문서번호	시설관리과-1759
결재일자	2015.2.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유광창		이문성	02/09 이계환
협조

공사기간 연기보고(수유동 441-31)

명에 의하여 강북구 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

2015. 02. 09

복 명 자 : 지방시설7급  유 광 창

공사현황

❍ 공 사 명 : 2014년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속공사)

❍ 현    황

****	****	****	***
*****	***********	******** * **********

❍ 요    지 : 공사기간 연기요청

보고내용

❍ 상기와 같이 계량기이설공사를 작업지시 하였으나, 현장의 터파기 미실시로 인하여 수요가측에서 공사 연기를 요청한 사항임.

처리의견

❍ 상기와 같은 사항으로 당초 공사기간을 아래와 같이 연기코자 합니다.

❍ 공사기한

지시번호	공사위치	당초기간	변경기간	비고
*****	***********	******** * **********	******** * **********

❍ 귀책사유 : 북부수도사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

끝.